문서번호	동남권사업과-8372
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	민자개발팀장	동남권사업과장
홍다예	이진오	08/23 김창환

「잠실운동장 일대 민간투자사업 전략환경영향평가」

준공기한 연기 검토 보고

2019. 8.

「잠실운동장 일대 민간투자사업」

전략환경영향평가 용역 준공기한 연기 검토 보고

*****************************************「잠실운동장 일대 민간투자사업 전략환경영향평가 용역」의 준공기한 연기 검토사항을 보고 드림.

□ 검토배경

○ 용역개요

- 용 역 명 : 잠실운동장 일대 민간투자사업 전략환경영향평가

- 용역기간 : '18. 11. 7. ~ '19. 9. 3.

- 용 역 사 : ㈜대영EEC

- 용 역 비 : 122,601천원

○ 잠실 민자사업 추진계획

******************************************

*******************************************

****************************************************************

□ 용역기간 연기 검토

○ 연기사유

**********************************************************************************************************************

****************************************

*****************************************************************************

***************************************************************************************************************

○ 용역기간 변경 내용 (계약금액 변경 없음)

구 분	당초	변경	증·감
용역기간	'18.11.8.~'19.9.3.	'18.11.8.~'20.4.14	224일

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규) 제8절 1-다에 따라 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정되어 지연배상금은 미부과

□ 비용관련 검토

○ 예산현황

(단위 : 천원)

'18년 예산	⇨	'18.11월 계약체결	⇨	'19년 예산(안) 시의회 의결('18.12월)
배정 : 150,000		계약금액 : 122,601 (선금 25,000 지급)		'19년 이월예산(97,601) - 명시이월 : 75,000 - 사고이월 : 22,601

○ 예산 집행현황

(단위 : 천원)

원인행위(계약금액)	지출액(선금지급)	집행잔액	비고
122,601	25,000	97,601	'19.12월 기성금(58,560) 지급 후 잔여금액 이월처리 예정

○ 연말까지 전략환경영향평가 초안 작성 후 해당 공정률 만큼의 기성금 집행후, 잔여 금액('19년 명시이월 예산 중 일부)은 사고이월 처리 예정

※ 2019년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)에 따라 명시이월된 사업은 불가피한 사유가 있을 때에 한하여 다시 사고이월 가능

□ 향후일정

○ '19. 8월: 용역 변경계약 체결

○ '20. 1월: 주민설명회 개최

※ PIMAC 적격성조사 일정 및 외부 여건에 따라 조기 시행할 수 있음

○ '20. 4월: 전략환경영향평가서 협의 완료 및 용역 준공

붙임 : 용역 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.