문서번호	건설혁신과-16322
결재일자	2019.12.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하도급혁신팀장	건설혁신과장
이정수		김하년	12/24 김재겸
협조
	주무관		김정수

건설공사 체불예방 강화를 위한-

대금e바로 재구축 추진 계획

2019.  12.

건설혁신과

건설공사 체불예방 강화를 위한-

대금e바로 재구축 추진 계획

전자계약 체결·사용자 맞춤형 홈페이지 환경 제공·통신망 개선 등 대금e바로 전면 재구축을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 대금e바로 정보화전략계획(ISP) 수립용역 추진계획 (’18. 12. 7.)

□ 2019년 대금e바로 운영계획 (안전총괄실장 방침, ’19. 3. 19.)

□ 대금e바로 정보화전략계획(ISP) 완료보고 (안전총괄실장 방침, ’19. 8. 1.)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 대금e바로 재구축 용역

□ 사업기간 : ’20. 2 ~ 12. (11개월)

□ 주요 구축내용

❍ 서울시 데이터센터 행정통신망(중계서버 등) 구축·운영

❍ 블록체인 기반 전자계약 체결 및 수기관리 문서 전자화 기능 구현

❍ 현금수령 확인서 등 대금지급 전자적 확인(휴대폰 확인) 기능 구축

❍ 맞춤형 환경으로 홈페이지 개선 등 대금e바로 시스템 전면 개편

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조, 제44조에 의거 협상에 의한 계약체결 방법 적용

❍ 「소프트웨어산업진흥법」에 의한 대기업인 SW사업자 참여제한 적용 및 소프트웨어 사업자(분야 : 컴퓨터 관련 서비스사업)로 신고를 필한 업체만 참여할 수 있음

※ 정량적 평가 유사사업 인정범위 : 입찰공고일 기준 최근 3년간 수행(준공)한 정보시스템 구축 또는 유지관리사업(단일실적 1억원이상, 부가세 제외)으로 한정(단, 상용SW·HW구매 적용이 주 사업인 실적 제외)

※ 대금e바로 재구축 상용 SW 구매 : 조달청 나라장터 3자 단가구매

□ 사 업 비 : 970백만원

(단위 : 천원)

구 분	사 업 비		비 고
합 계	********		·산출내역서 붙임 참조
사 무 관리비	********* ********************	***** *******	·150,000원×8명×2회 ·서버용 SW 등 6식
전 산 개발비	***************	*******	·기준(SW대가산정가이드)
감리비	***************	******	·전자정부법 시행령 71조 전자정부법 시행령 제71조(정보시스템 감리의 대상), 정보시스템 구축사업으로서 사업비가 5억원 이상인 경우 감리대상

※ 예산과목 : 건설정책의 효율성 제고, 건설정책강화, 대금e바로 재구축

Ⅲ		세부 추진계획

□ 추진체계

********	**	***** ********		**	*******
********* ********** ******************* *********** ********** ******** ******** ******* ***********		***********			************ ********** ************ ************* ***********
		******			****
		*********************			**********

□ 추진 조직별 역할

구 분		세 부 내 용
기관 · 관계자	건설혁신과 (하도급혁신팀)	- 사업 총괄 및 시행 - 사업 공정관리 및 감독 - 세부 추진실적 점검 및 보고 - 산출물 관리 및 검수 등
	관련부서·기관 (시·자치구 등)	- 소관부서(기관) 업무분석 협조 - 관련 정보시스템 현황 설명 - 업무 및 정보화 개선요구사항 제시 및 점검(확인) - 데이터센터 인프라(통신망) 구축·운영 등 - 그밖의 개발기능 테스트 참여 등 협조
사업자	재구축 수행업체	- 사업추진에 따른 계약이행 - 대금e바로 재구축 - 설계 및 개발에 대한 품질보증·산출물 제출 등
	감리 업체	- 재구축 감리 이행(2단계 감리)

□ 구축 세부내용

분 야	구축내용	*****	*****
통신망 개선	데이터센터 행정통신망 구축	*********************************	****** **********
계약관리	블록체인 기반 전자계약 체결 기능구축	*******************************************	*********************************************************************************************************************
행정서류 간 소 화	수기관리 문서 전자화	************************************************	********* ********
정보공유	재무회계시스템 등과 연계 강화	******************************************	***** ********
대금지급	블록체인 기반 대금지급 전자적 확인 기능 구현	***************************************	********************************************************************************************************************
사 용 자 편 리 성	사용자 맞춤형 홈페이지 개편 등	*****************************	***** ************

※ 상용 SW 도입 내역

제 품 명	규 격	수 량	비 고
*****************	**********	**	***
*********************	**********	**	***
************	********	**	*****
***************** **********	************	**	****

Ⅳ		기대효과

□ 데이터센터 행정서버(중계서버 등) 독립운영으로 보안성 강화

□ 전자 계약체결 구현으로 계약의 신뢰성 및 잠재체불 방지

□ 현금수령 확인서 등 전자적 확인 기능 구현으로 사회적 약자 보호

□ 사용자 맞춤형 홈페이지 메뉴구성으로 접근성 및 편리성 향상

Ⅴ		추진일정

□ 중복성 협의 등 사전절차 이행 및 사업자 선정 : ’19. 12. ~ ’20. 2.

❍ 소프트웨어 영향평가 및 적정사업기간 산정

❍ 행정안전부 정보화 중복성 검토 및 제안요청서 검토(사전공개)

❍ 입찰공고, 제안서평가, 기술협상 등 사업자 선정

□ 재구축(개발 및 타 기관 연계 등), 시험운영 : ’20. 3. ~ 12.

❍ 요구사항 분석·설계·구현·테스트 등 시스템 개발 및 시험운영

❍ 국토교통부, 금융기관 등 자료 연계에 따른 업무협의 및 구축

❍ 데이터센터 서버 구축 및 상용 소프트웨어 도입

□ 대금e바로 서비스 개시 :  ’21.  1.

붙 임   1. 사전절차·사업자선정 상세일정 1부.

2. 재구축 상세일정 1부.

3. 산출내역서(개발, SW도입, 감리) 각 1부.  끝.