코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 변경의뢰

1. 하천관리과-6437(2020.04.24.)호와 관련입니다.

2. ‘흑석펌프장 이전 기본 및 실시설계 용역’에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 용역개요

1) 용역기간 : 2019. 05. 07. ~ 2020. 04. 30.

2) 용 역 사 : ㈜한국종합기술외 2개사

3) 용 역 비 : 1,102,000천원

나. 준공기한 연기 내용

구 분	과업기간	용역비	비고
당 초	’19. 05. 07. ~ ’20. 04. 30.	1,102,000천원	용 역 비 변동없음
변 경	’19. 05. 07. ~ ’20. 12. 31.

다. 연기사유 : **********************************************************************************

붙임 : 1. 방침서(용역 준공기한 연기 검토 보고) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	하천관리과장
주무관	최병희		치수설비팀장	이문주		하천관리과장	04/24 한유석
협조자
시행	하천관리과-6447	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/	elecpo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)