문서번호	물재생시설과-5705
결재일자	2020.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
사무관	물재생기전팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
김종희	최년수	윤창진		04/24 이정화
협 조
	주무관		김병용

서남 슬러지건조시설(2단계) 설치사업

기본 및 실시설계 용역결과 및 추진계획 보고

2020. 4.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

서남 슬러지건조시설(2단계) 설치사업

기본 및 실시설계 용역결과 및 추진계획 보고

서남물재생센터 슬러지건조시설(2단계) 설치사업 기본 및 실시설계 용역을 추진하고 그 결과 및 공사 추진계획을 아래와 같이 보고드림.

□ 용역 개요

❍ 용역기간 : 2018.10.22. ~ 2020.03.31

❍ 용역업체 : ************

❍ 용역금액 : *********

	<2단계 건조시설 설치사업>
- 시설규모 : 슬러지건조시설 270톤/일(최대 300톤/일) 설치 - 처리대상 : 제2처리장, 현대화시설 및 총인시설 발생슬러지 탈수케익 ※ 1단계 처리대상 : 서남센터에서 발생되는 하수슬러지 탈수케익 - 처리방식 : 슬러지 건조처리(함수율 : 60~85% → 10%이내)

□ 추진 경위

❍ ’15.09 : 하수슬러지 처리 자립화 대책

- 4개센터에 하수슬러지 자체처리시설 1,170톤 설치

※ 서남2단계(270톤/일)는 민자사업으로 추진

❍ ’16.06 : 서남 건조시설(2단계) 설치방안 보고 : 민자 → 재정 전환

❍ ‘18.10 : 설계용역 계약 및 착수

❍ ‘19.06 : 건조공법 선정

❍ ‘19.11 ~ ’19.12 : 설계경제성(VE) 심사

❍ ‘20.01 : 건설기술 심의

❍ ‘20.02 ~ ’20.03 : 건축(경관) 심의 및 투자심사(재심사)

❍ ‘20.03 : 설계용역 준공

□ 세부 추진결과

❍ 건조공법 선정

- 선정기준

· 업체의 건조공법 기술제안서를 제출받아 공법선정평가위원회에서 평가

- 선정결과

*************************************************************

❍ 시설용량 및 사업비

- 시설용량 산정

(단위 : 톤/일)

센터 슬러지 발생량(톤/일)					슬러지 처리시설 용량(톤/일)
계	1처리장	2처리장	현대화시설	총인 처리시설	계	1단계 건조시설	2단계 건조시설	소각 시설
***	***	***	***	***	***	***	***	***

- 사업비 산출

(단위 : 억원)

당초(최초 투자심사)			변경(재투자심사)
계	공사비	설계비	계	공사비	설계비	건설사업 감리	기타
***	***	*	***	***	*	**	*

※ 건물 신축, 환경처리시설 및 악취방지시설 강화 등으로 사업비 증가

⇒ ‘20. 3월 재투자심사 : 조건부(건조 후 건조재 수요처 확보) 추진

❍ 설치장소

당초	변경	비 고
- 설치장소 ·#2탈수기동 건물 내 - 선정목적 ·기존건물 재활용 하여 사업비 절감	- 설치장소 ·#2탈수기동 인근 유휴부지 - 선정목적 ·향후 유지관리 편리성 등 고려

❍ 운영인력 : 10명

*************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************

□ 설치공사 추진계획

❍ 추진방향

- 사업의 신속한 추진을 통해 슬러지처리 자립화 조기실현

- 센터에서 발생되는 소화가스를 건조시설 에너지로 재활용하여 물재생센터 에너지 자립률 향상 도모

❍ 추진기간 : 착공일로부터 20개월(시운전 3개월 포함)

※ 2020. 5.~2021. 12월 예정

❍ 추진방법

- 건조시설 설치공사 및 감리 분리발주

※ 건설기술진흥법 제39조 및 동법 시행령 제55조에 의한 총공사비

200억원 이상인 건설사업관리 대상

- 최적의 설치공간 확보 등 사업의 효율적 추진을 위하여 사업발주 등은 센터에서 수행

(※물재생센터 하수슬러지 자체처리시설 계획:물재생시설과-3370, ‘16.03.07.)

- 건조설비의 최적 성능보장을 위하여 시공실적이 있는 업체로 입찰 참가제한 등 제한입찰을 통한 업체선정

❍ 추진일정

- 공정계획

일 자 공 종	2020년			2021년
	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
공사 발주
건조기 제작
건조기 설치
전기 공사
시운전 및 준공

- 연도별 예산투자 계획

(단위 : 억원)

연도	계	기투자	2020년	2021년
예산액	319	7	200	112

□ 기대 효과

❍ 안정적인 슬러지처리시설 확보로 야적․이송시 발생하는 악취 등으로 인한 시민불편 해소.

❍ 슬러지 처리에 필요한 에너지 자체생산 활용 및 발생 슬러지를 전량 에너지로 재활용.

❍ 물재생센터 에너지 자립률 향상에 기여.  끝.