문서번호	총무과-4430
결재일자	2020.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	총무과장	한성백제박물관장
정혜연	이종덕	박용헌	04/24 김기섭

박물관 편의시설 확충 및 정비사업 설계용역

준공기한 연기 검토 보고

2020. 4.

한성백제박물관

(총  무  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

박물관 편의시설 확충 및 정비사업 설계용역

준공기한 연기 검토 보고

박물관 편의시설 확충 및 정비사업 설계용역 추진 중 다양한 방수, 방음 공법 검토 및 설계 보완 등을 위해 준공기한을 연장하고자 함

*********************

***********************************

******************************)

**********************

************************************

************

*********************

*************************

********************************

□ 추진현황

○ 2020. 1. 사업 추진계획 수립

○ 2020. 2. 기술용역 타당성 심사

○ 2020. 2. 입찰공고 및 계약체결

○ 2020. 3. 설계용역 착수 보고

□ 계약변경 내용 : 준공기한 연장

○ 연장의 필요성

- 건물 방수, 방음 기능 확보를 위한 다양한 공법 검토 필요

- 배수로 및 포장 정비구간 증가로 인한 추가 설계 및 협의 필요

○ 준공기한 연장 개요

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약기간	2020.2.28.~2020.4.27.	2020.2.28.~2020.5.15.	18일 연장

- 계약금액 : 변경없음

- 지연배상금 : 미부과

· 귀책소재 : 한성백제박물관

· 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우에 해당하여 지연배상금을 부과하지 않음

- 조치내용 : 상기 사유로 준공기한을 18일 연장하고자 함

□ 향후계획

○ 2020. 4. : 준공기한 연장 및 계약 내용 변경

○ 2020. 5. : 용역수행 완료, 설계도서 납품 및 준공.  끝.