문서번호	방재시설부-6094
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김광호		오열상	04/28 박홍봉
협 조

- 응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 -

설계안전성 검토 용역 시행계획

2020. 4.

- 응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 -

설계안전성 검토 용역 시행계획

「응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 기본 및 실시설계용역」내용에 대하여 건설공사의 안전을 선제적으로 관리하기 위한 설계안전성 검토용역을 시행코자 보고드림

□ 추진근거

○ 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리) 및 같은 법 시행령 제75조2(설계의 안전성 검토)

※ 대상 : 지하 10m 이상을 굴착하는 건설공사(응봉유수지 : 지하 17.3m)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사 설계안전성 검토 용역

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 고산자로 125-98

○ 과업내용 : 기본 및 실시설계용역에 대한 설계안전성 검토

- 위험요소의 도출, 위험요소에 대한 위험성 평가 및 저감대책 수립,

저감대책의 이행, 설계안전검토보고서 작성․제출 등

○ *****************

○ ****************

- 한국시설안전공단 검토 비용(별도) : 220만원/건 (300억 미만 공사적용)

□ 용역 발주계획

○ 입찰방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

나목(추정가격 2천만원 이하인 용역계약)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 수의계약 운영요령

○ 수의계약 사유

- 용역 금액이 소액이고, 근래 신설된 건설기술진흥법에서 정한 설계안전성 검토 수행 경험이 있는 업체와 계약체결하여, 과업내용 내실화 및 한국시설안전공단(검토기관)과의 기 협의된 사항을 토대로 조속히 절차를 이행코자 함.

○ 수의계약 대상자

- 상  호 : ************************************

- 대표자 : ***

- 주  소 : ******************

- 업  종 : ***********

○ 예산과목 : 도시기반시설본부 방재시설부, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, 응봉유수지 CSOs 저류조 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

(예산편성부서 : 물순환정책과)

□ 세부추진계획

○ 추진 절차

기본 및 실시설계 도서 검토		위험요소 및 저감대책 발굴		・설계안전검토보고서 검토 ・ 워크숍 실시 ・ 평가기준 및 허용수준 협의 ・ 저감대책 확인검토 등		보고서 검토 (한국시설안전공단)		제 출 (국토교통부)

○ 소요기간 : 계약일로부터 90일간

- 설계안전성검토보고서 작성 : 30일 이내

- 한국시설안전공단 검토     : 30일 이내

- 검토의견 보완 및 조치 결과서 작성․검토․제출 : 30일 이내

※ 과업기간은 한국시설안전공단 협의 기간에 따라 변동될 수 있음

□ 향후계획

○ ‘20. 5월 : 설계안전성 검토 용역 계약의뢰 및 용역 착수

○ ‘20. 8월 : 용역 준공(예정)

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서(견적서 포함) 1부. 끝.