문서번호	기반시설과-1444
결재일자	2020.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	04/29 전영주
협 조

「성수대교북단외2개소승강기설치공사」실정보고에 대한 검토보고(사토장변경)

2020. 4.

한강사업본부 시설부

「성수대교북단외2개소 승강기 설치공사」

실정보고에 대한 검토보고

「성수대교북단외2개소승강기설치공사」관련 시공사로부터 “사토장변경”에 대한 실정보고가 있어 이에대한 검토 보고임.

Ⅰ		공사개요

□ 공  사  명 : 성수대교북단외2개소 승강기설치공사

□ 공사기간 : 2019. 11. 04. ~ 2020. 12.20.

□ 계약상대자 : ㈜명남종합건설 대표 박남재

□ 계약금액 : 3,244백만원(1차 1,096백만원, 2차 2,148백만원)

Ⅱ		실정보고

❍ 관련근거

- 명남제20-06(‘20.4.27)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조

(그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제7절 실비산정

3. 나. 3) 당초 운반로 전부가 변경되는 경우

❍ 사토장 변경 사유 (수도권 매립지 반입불가)

- 당초 사토장은 “수도권매립지”로 설계되어 사토장반입허가 신청하였으나 반입불가로 회신되어 사토장 변경필요(매립부-719(4.29))

○ 사토장 변경 현황(단가비교)

구분	운반위치		운반량	운반거리	운반단가	비 고 (증,감)
당초	성수대교북단	수도권 매립지 (인천시서구백석동)	125㎥	50.3km	14,975원/㎥
	동작대교북단		246㎥	44.3km	13,312원/㎥
	성수대교남단		53㎥	52.2km	15,257원/㎥
변경	성수대교북단	김포시 하성면	125㎥	57.7km	21,126원/㎥	증6,331
	동작대교북단		246㎥	50.0km	19,386원/㎥	증6,074
	성수대교남단		53㎥	52.9km	19,678원/㎥	증6,074

○ 공사비 변경 현황

구 분	단위	수량(㎥)		금 액(천원)		증·감
		당초	변경	당초	변경
직접공사비	㎥	424	424	5,932	8,452	증2,519
제 경 비				1,397	1,987	증590
부가세				733	4,044	증311
합계				8,063	11,484	증3,421

○ 시공사보고 : 상기와 같이 사토장변경에 따른 거리증가로 운반비증가가 예상되나 공사의 원활한 이행을 위하여 운반단가 변경없이 당초 계약단가 대로 추진

Ⅲ		조치계획

○ 시공사의 보고 내용에 대하여 검토한바 운반비 단가 변경없이 변경함이 공사의 원활한 진행을 위하여 타당할것으로 사료됨에 따라 시공사 보고대로 사토장 변경을 승인코자 함.

붙임 : 실정보고 문서 1부.  끝.