문서번호	기반시설과-1441
결재일자	2020.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
나병윤		04/29 라철흠
협 조

『2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

신규비목 처리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

신규비목 처리계획 보고

「2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」시행 중 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규비목 처리계획에 대하여 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 3. 16. ~ 2020. 11. 30.

○ 계약금액 : 305,290천원

○ 계약상대자 : 단야공영㈜ 대표 김은숙

○ 공사규모

- 진·출입시설 보수 : 데크보수 300㎡, 조류방지망 설치 300㎡, 철재면 재도장 160㎡, 오일스텐재도장 800㎡ 등

- 피아노물길 보수 : 석재판 철거 후 재설치 85㎡

2		현황 및 보고내용

□ 현황

○ 각종 시설물(5종 146개소) 유지․관리, 시설물 노후화로 보수물량 매년 증가하고 있으며, 특히 하절기 장마철 보수물량 증가 예상

○ 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 다수 발생

□ 보고내용

○ 상기와 같이 신규공종이 발생함에 따라 계약금액 조정 필요

- 신규비목의 신규단가 반영 협의건(단야2020 – 한강, ‘20.4.10.시행)

○ 발주청 요구로 인해 발생하는 신규비목은 협의율 93.372% 적용

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 제74조 및 공사계약일반조건 제20조

· 신규비목의 단가는 설계단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위에서 계약당사자 간에 협의하여 결정

· 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 않는 경우

⇒ [설계단가 + (설계단가 × 낙찰률)] × 50/100

- 신규비목에 대하여 설계단가 적용 요청(계약상대자 → 한강사업본부)

- 신규비목에 대하여 계약상대자와 발주청 간 이견으로 협의율(93.372%) 적용

⇒ [설계단가(100%) + 낙찰률(86.745%)] × 50/100 = 93.372%

※ 단, 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 경우에는 계약금액조정 대상 제외(낙찰률 적용)

3		행정사항

○ 추후 설계변경 시 신규공종 및 물량 증·감 사항을 반영하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 1. 계약금액조정 요청 공문 및 회의록 각 1부.

2. 진출입시설물 관리 현황 1부.  끝.