문서번호	문화시설과-4266
결재일자	2020.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도서관건립추진팀장	문화시설과장
권기용		이해원	04/29 박병현
협조

강북 청소년 도서관 건립 타당성 조사용역 용역기간 연장계획

2020. 4.

강북 청소년 도서관 건립 타당성 조사용역 용역기간 연장계획

코로나-19로 인하여 청소년 설문조사가 어려워 계약기간을 연장하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 강북 청소년 도서관 건립 타당성 조사용역

○ 용역기간 : ’19. 12. 6. ~ ’20. 5. 4.

○ 계약금액 : ***********************

○ 용역업체 : ************

○ 과업내용

- 현황조사 및 사업여건 분석

- 강북 청소년 도서관 건립 타당성 검토

- 기본구상(안) 및 건립방향 제시

- 강북 청소년 도서관의 지속적인 운영관리를 위한 활성화 방안 모색

- 투자심사 승인에 필요한 타당성 조사 및 검토

□ 그간 추진경과

○ 용역 계약체결	’19.12. 6.

○ 착수보고회	’19.12.12.

○ 중간보고회	’20. 2.12.

□ 용역기간 연장계획

○ 용역기간 연장

구 분	당 초	변 경
기간 연장	’19.12.6. ~ ’20.5.4.	’19.12.6. ~ ’20.8.2.

※ 계약금액 변동 없음

○ 연장사유 : 코로나-19로 인하여 청소년 설문조사에 어려움이 있어 용역기간 연장

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과(용역업체와 합의에 의한 과업기간 변경 조정)

□ 향후 일정

○ 변경계약(계약기간 연장) 의뢰(→ 재무과)	’20. 4. 29.

○ 용역준공                                                  ’20. 8.  2.

붙임  준공기한 연기의뢰서 1부.

합의각서 1부.

용역계약서 1부.  끝.