실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

금하지하차도 개통에 따른 추가 시설물 설치

실정보고

사유

금하지하차도 개통 전 서울시설공단 합동점검 시에 유지관리를 위한 시설물 추가 설치 요청 사항을 반영

건설사업관리단

검토의견

금하지하차도 합동점검 결과에 의한 서울시설공단 요구사항에 대한 추가 시설물 시공 수량 및 공사비는 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
부대공	- - - - - - 소함기함 STS 15개 수위지시조절기(기어식) 1개 수위지시조절기(초음파식) 1개	신축이음부 플레이트 93m 신축이음부 열선 93m 우레탄도장(t=3mm) 129m2 수성페인트칠 96m2 스틸그레이팅 4개소 안내표지판 19개 소함기함 STS 16개 - 수위지시조절기(초음파식) 2개	증) 93m 증) 93m 증) 129m2 증) 96m2 증) 4개소 증) 19개소 증) 1개 감) 1개 증) 1개
금액	14,000,000	60,900,000	증) 46,900,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

금하지하차도 유지관리를 위한 추가 시설물 설치 요청에 대한 실정보고 내용은 적정함.

비 고

붙임: 실정보고 1부.

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

05/04

代진재섭