문서번호	운영과-2612
결재일자	2020.5.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	05/04 정훈모
협조

- 정산시행 및 검수요청 -

제3처리장 습식탈황설비(2만) 대체약품 이송관 설치공사

2020. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

- 정산시행 및 검수요청 -

제3처리장 습식탈황설비(2만) 대체약품 이송관 설치공사

우리센터의 제3처리장 습식탈황설비(2만) 대체약품 이송관 설치공사에

대하여 아래와 같이 정산처리 시행하고자 함.

1		계 약 현 황

□ 발주방법: 수의계약

□ 계약업체: ㈜주영펌프공업 대표자: 김미순

□ 계약기간: 2020. 4. 27. ~ 2020. 5. 4.

2		계약 변경 내용

□ 정산처리 내역

계약금액	당 초	금17,913,200원(금일천칠백구십일만삼천이백원정)
	변경후	금17,528,000원(금일천칠백오십이만팔천원정)
	증․감액	금385,200원(금삼십팔만오천이백원정)
계약기간변경	당 초	2020. 4. 27.～2020. 5. 4.
	변경후	2020. 4. 27.～2020. 5. 8.

□ 변경사유

- 현장 여건상 고려 물량 · 용접개소 증감으로 기간연장후 정산처리 시행.

3		행 정 사 항

□ 상기내용에 대하여 설계변경 및 최종정산 시행.

붙임: 1. 설계내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.