문서번호	건축부-7651
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
김동범		조영수	05/06 임인구
협조

『금천소방서 건립공사』

본인증(BF, 녹색건축, 건축물에너지효율등급) 실정보고

2020. 5.

도시기반시설본부

(건축부)

『금천소방서 건립공사』

본인증(BF, 녹색건축, 건축물에너지효율등급) 실정보고

「금천소방서 건립공사」관련 건설사업관리단으로부터 본인증(BF, 녹색건축, 건축물에너지효율등급) 용역비 및 인증 수수료에 대한 실정보고가 제출되어 검토 보고 드림

1		공 사 개 요

○ 공 사 명: 금천소방서 건립공사

○ 위    치: 서울특별시 금천구 독산동 1054-8 외 14

○ 공사규모: 지하1층/지상6층, 연면적 5,249.56㎡ 신축

○ 도급금액: 8,840백만원

○ 공사기간: 2019.11.11. ~ 2021.7.10.

○ 시 공 자: 유호산업개발(주)

○ 건설사업관리자: ㈜아이티엠코퍼레이션 건축사사무소 외 1

2		실정보고 내용

○ 관련 근거

- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제97조 “설계변경 관리”

- 금천소방서 건립공사 건축 본인증 실정보고 승인 요청_itm 202 제20-98호

- 금천소방서 건립공사 건축 본인증 실정보고서 제출_유호 20-67호(‘20.4.23.)

○ 실정보고 내용

- 본인증(BF, 녹색건축, 건축물에너지효율등급) 용역비 및 인증  수수료 반영

구분	변경사유 및 산출근거	비고
****** **********************	************************************************** ****************************************	*** ********

3		건설사업관리단 검토의견

○ ******************************************************

4		처 리 의 견

○ ***********************************************

붙임  실정보고 승인 요청 1부.  끝.