의원 요구 자료 제출

시 행	거점성장추진단-6664	(		)
접 수		(		)
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	재무과장

주무관	산업거점개발팀장	산업거점활성화반장			결재
이원배	손철주	05/06 한정훈
협 조

제 목	결산검사위원 요구자료 제출(요구번호 2020-60번)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

엄은숙 결산검사위원

요구번호 : 2020-60

요구자료

1. G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진 지출 세부내역 (일자별)

통계목	지출액
201-01 사무관리비	135,824,200
203-03 시책추진업무추진비	7,995,500
308-01 자치단체경상보조금	100,000,000

2. G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진

- 시설비 지출내역 및 사고이월 사유

	예산액	지출액	사고이월	잔액
401-01 시설비	916,841,570	655,234,910	95,959,500	165,647,160

- 403-01 자치단체자본보조금 : 2017. 2018년 지출액 내역, 2019년도 당초 예산 배정 계획안(사업계획서등)

3. G밸리 문화복지센터 조성

- 당초 사업계획서, 2017~2019년 집행/이월내역, 사업지원 사유(관련문서),향후 계획안

□ 위원님께서 요구하신 G밸리 활성화 및 문화복지센터 조성 사업 관련 자료를

아래와 같이 제출합니다.

1. G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진 지출 세부내역(일자별) : 붙임1

2. G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진

- 시설비 지출내역 및 사고이월 사유

‣ 시설비 지출내역

지출내용	지출액	비고
계	655,234,910
G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 용역	95,959,500
G밸리 교통영향평가 용역	60,250,610
G밸리 환경영향평가 용역	24,800
G밸리 상징가로 조성사업	499,000,000	금천구 재배정

‣ 사고이월(95,959,500) 사유 :“G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립”용역 관련 관계부서 및 관계기관 협의 등으로 인해 불가피하게 과업기간이 연장

- 403-01 자치단체자본보조금 : 2017. 2018년 지출액 내역, 2019년도 당초 예산 배정 계획안(사업계획서등) : 붙임2

※2017. 2018년 자치단체자본보조금 예산 편성내역 없음

3. G밸리 문화복지센터 조성

- 당초 사업계획서 : 붙임3

- 2017~2019년 집행/이월내역

(단위 : 백만원)

연 도	(본) 예산액 (A)	전년 이월(B)			예산현액 (C = A +B)	지출액 (D)	다음연도 이월(E)			이월사유
		계	사고이월	명시이월			계	사고이월	명시이월
‘17	0	2,599 (2,021)	-	시설비 2,569(1,991)	2,599 (2,021)	582 (15) 설계용역비	2,006 (1,996)	시설비 1,991(1,991)	-	’17. 11월 공사계약 완료하였으나, 미착공으로 공사비 이월조치
				시설부대비 30(30)				시설부대비 15(5)
‘18	5,027	2,006 (1,996)	시설비 1,991 (1,991)	-	7,033 (2,005)	2,929 (2,005)	4,085 (0)	764 (0)	3,321 (0)	’18. 3월 공사 착공 후 사업부지의 모양이 장방형(55m×18m)으로 기초공사 건설 장비의 중복 투입이 어려워 기초 터파기 공사기간이 약 4개월 지연됨에 따라 순차적으로 관계된 공사비이월
			시설부대비 15 (5)
‘19	6,451	4,085 (0)	764 (0)	3,321 (0)	10,536	1,950	8,570	4,686	3,884	주계약자 (도량기업) 재정 상태 부실, 타 공사현장 하도급업체 대금체불 등으로 각종 소송 진행 및 대표자 구속 상태로 공사 중단
					9,248	1,522	시설비	3,842	3,884
					1,268	424	감리비	844	0
					20	4	시설부대비	0	0

- 사업지원 사유(관련문서) 및 향후계획안

‣ 사업지원 사유 : G밸리 내 부족한 근로자 지원시설 확충을 위해 정부지원 사업인 「산업단지 편의시설 확충사업」에 공모하여 선정 추진(‘14년)

※ 산업단지별 지원시설 현황 : G밸리 10.9%, 오성 21.8%, 시화 21.6%C

‣ 향후계획

‧ ’20. 10~11월 : 시설 관리 민간위탁 업체 공모·선정

‧ ’20. 11월    : 계약 심사 및 체결

‧ ’21.  2월    : 공사 준공 및 개관

따로붙임 : 1. G밸리 활성화 추진 지출 세부내역 1부.

2. 자치단체자본보조금 사업계획(안) 2부.

3. G밸리 문화복지센터 조성 사업계획서 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	경제정책실 (산업거점활성화반)	담당사무관	손 철 주
	☎20133-8478	담당자	이 원 배
	작 성 일 : 2020.5.6