문서번호	교통운영과-7284
결재일자	2020.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		교통안전팀장		교통운영과장
손태빈		김세교		05/06 강진동
협 조

무단횡단 금지시설 설치 구간 변경 보고

2020. 5

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

무단횡단 금지시설 설치 구간 변경 보고(광진서)

2020년 보행자 횡단 사고를 줄이기 위하여 서울지방경찰청과 협의하여 구간을 선정하였으나 관할 경찰서에서 설치구간 변경 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임

□ 관련근거

○ 교통운영과-4421(‘20.3.13) : 무단횡단 금지시설 설치 예산 재배정 계획보고

○ 광진경찰서 교통과-2873(‘20.4.27) : 무단횡단금지시설 설치대상 지점 변경 요청

□ 문 제 점

○ 당초 2020년 무단횡단금지시설 설치지점 전수조사 결과에 따라 광진서 관할 구간 용마산로 등 2개소를 선정하고 예산 재배정을 완료 하였으나 보행자 무단횡단으로 인한 사고가 연이어 발생한 구간이 있어 설치 우선순위를  변경 요청한 사항임

□ 설치 구간 변경 검토

○ 위와 같이 2020년 무단횡단으로 인한 사망사고 지점에 대하여 시설물 설치가 시급한 상황으로 지점을 변경하여 설치하고

○ 3순위 요청구간(용마산로)은 예산 집행 결과에 따라 추 후 검토

당 초	변 경	비 고
용마산로 350m (중곡사거리~용곡삼거리) 능동로 700m (어린이대공원역~건대입구역)	광나루로 150m (광진소방서~구의사거리) 능동로 700m (어린이대공원역~건대입구역)

□ 조치계획

○ 위 검토결과를 사업시행 부서인 성동도로사업소에 통보하여 무단횡단 금지시설 설치에 만전을 기하고

○ 연장 변경에 따른 예산은 무단횡단금지시설 설치를 위한 노면표시 조정 예산으로 활용(재배정 예산 변경 없음)

붙  임 : 관련 공문.  끝.