문서번호	토목부-8895
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김재건		박일연	05/06 김용제
협 조

지장물 조사비 반영 검토보고

(고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사)

2020.5.

서울특별시 도시기반시설본부

(토 목 부)

지장물 조사비 반영 검토보고

고덕 보도교 설치와 관련하여 교대 기초위치 변경검토를 위해 기 실시한 지장물 조사의 반영금액 적정성에 대해 검토보고 드림

Ⅰ		관련근거

○ 지장물 조사 최종 보고서 제출-창덕궁감 2019-119호(′19.9.30.)

○ 공사 추진현황 보고-토목부-19004호(′19.10.21.)

○ 실정보고건 제출(고덕교 지장물 조사비 반영)-창덕궁감 2020-035호(′20.5.4.)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사

○ 공사위치 : 강동구 강일동 599일원

○ 공사규모 : 교량확장 1개소(4차로→6차로), 보도교 설치(교량 양측 각 B=2.5m)

○ 공사기간 :′19.01.18. ~ ′20.12.31.

○ 총공사비 : 3,149백만원

○ 시공사/감리단 : 임원개발(주)외 1개사/(주)경동엔지니어링외 1개사

Ⅲ		검토내용

○ 검토사유

- 공법 변경전 독립 보도교 설치에 따른 적절한 교대위치를 찾기 위해 지하 지장물 조사를 4차례 실시하고 조사비를 반영하고자 함

- 지장물 조사기간 :′19.04.~′19.09.

구분	일 자	인 력		장 비		비 고
		규격	수량	규격	수량
1차조사	4/25	보통인부	2인	B/H03W	1.0대
2차조사	8/6	보통인부	1인	B/H035	0.5대	단가 70%적용
	8/9	보통인부	2인	B/H035	1.0대
	8/10	보통인부	2인	B/H035	1.0대
3차조사	8/27	보통인부	1인	B/H03W	1.0대
	8/28	-	-	B/H03W	1.0대
	8/29	-	-	B/H03W	0.5대	단가 70%적용
4차조사	9/18	보통인부	2인	B/H03W	1.0대

○ 투입 수량 검토

○ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
	지장물 조사비	-	5,408	5,408
■	직접공사비	-	5,408	5,408
	간접공사비	-	1,782	1,782
■	공 급 가 액	-	7,190	7,190
	부가가치세	-	719	719
■	총 공 사 비	-	7,909	7,909

Ⅳ		감리단 검토의견

○ 19년 7월 실시한 기술자문회의 결과 보도교 기초위치 변경을 위한 추가 조사가 필요하였으며, 현장의 공법변경 검토를 위한 지장물 조사 비용을 반영함이 타당

Ⅴ		조치의견

○ 감리단 검토의견과 같이 지장물 조사비 반영 실정보고 사항을 승인하고 추후 설계변경시 금액 반영하고자 함

- 총공사비(증) 7,909천원

붙 임 : 1) 감리단 검토의견서 1부.

2) 시공사 실정보고 1부.  끝.