투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약변경 의뢰(돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사)

우리 본부에서 시행중인 「돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고, 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사

나. 도 급 비 : ***************

다. 공사기간 : 2019. 11. 11. ~ 2020. 6. 18.

라. 도 급 자 : ***************

마. 설계변경

1) 공사기간 : 변경없음

2) 계약금액 조정

구분	변경전	변경후	증감	비고
주계약자(조경)	***********	***********	*	*******
부계약자(건축)	***********	***********	**********	*****
부계약자(금속창호)	***********	***********	***********	****
합계	*************	*************	***********

3) 변경사유 : 현장여건 변동 등에 따른 실정보고 승인사항 반영

바. 예산과목 : 도시기반시설본부 방재시설부, 생활주변녹지확충, 생활주변 녹지확충, 수직정원 조성, 시설비및부대비, 시설비

(예산편성부서 : 푸른도시국 조경과)

붙임   1. 설계변경 검토보고(건축부) 1부.

2. 설계변경 내역서 및 합의각서 각 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

							방재시설부장
주무관							김희숙			공원시설과장					이병호					방재시설부장					05/06 박홍봉
협조자
시행			방재시설부-6424									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8683						/전송			02-3708-8756					/	khs2012@seoul.go.kr												/	부분공개(7)