“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기에 따른 변경계약 시행 (청사 엘리베이터 설치공사-소방감리용역)

1. 우리사업소에서 시행중에 있는 “청사 엘리베이터 설치공사 소방감리용역” 건에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한연기) 처리하고자 합니다.

가. 공 사 명: 서부수도사업소 청사 엘리베이터 설치공사 소방감리용역

나. 계약업체: 에이스에프엔씨  대표자 ***

다. 계약금액: *************************

라. 준공기한연기

- 당 초: 2020. 5. 08.

- 변 경: 2020. 6. 08.

마. 지체상금 부과여부: 미부과

바. 연기사유: 선행공정인 건축공사 지연으로 인한 중공기한 연기

붙임  검토보고서 1부.  끝.

★주무관	방만천		행정관리팀장	강정환		행정지원과장	05/06 박달경
협조자	주무관	구자람
시행	행정지원과-8703	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)