문서번호	정수시설과-5015
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	05/06 이철범
협 조
	주무관			변민용

「제1중계펌프장 노출배관 부식방지 공사」 설계변경(계약금액 조정) 검토보고

2020. 4.

암사아리수정수센터

「제1중계펌프장 노출배관 부식방지 공사」

설계변경(계약금액 조정) 검토보고

금회 ⌜제1중계펌프장 노출배관 부식방지 공사⌟와 관련하여 제경비정산에 따른 계약금액이 변경되어 이를 검토하고 보고드림

□ 사업개요

❍ 건    명 : 제1중계펌프장 노출배관 부식방지 공사

❍ 계약금액 : 금105,078,070원

❍ 공사기간 : ’20.3.2. ~ ’20.7.29.

❍ 사업내용 : 펌프관로 및 흡수정 드레인관 녹제거 및 도장 291m2

❍ 계약업체 : ㈜동인건업 대표 류 성 오

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경사항

계약금액	당 초	*************
	변 경	*************
	증·감액	************
공사기간	당 초	********************
	변 경	****

※ 금회 계약금액 변경에 따른 세부내역 : 붙임참조

❍ 변경사유

- 산업안전관리비 실비정산에 따른 감액

- 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 미사용에 따른 감액

□ 향후계획

❍ 변경계약 시행 및 준공 : ’20.5.

붙임 : 설계변경내역서, 합의서, 증빙서류 각 1부.  끝.