코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계용역 변경계약 의뢰(한양도성 숙정문 주변시설 및 성벽 보수공사 설계용역)

1. 한양도성도감-4934(2020. 5. 7.)호와 관련입니다.

2.「한양도성 숙정문 주변시설 및 성벽 보수정비공사 설계용역」관련 변경계약(준공기한 연기)을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한양도성 숙정문 주변시설 및 성벽 보수정비공사 설계용역

나. 계약상대자(설계자) : ㈜예그린건축사사무소 ******

다. 계약금액 : *******************

라. 계약기간 : ‘20. 3. 6 ~ ’20. 5. 14

마. 변경계약 요청내용(용역 준공기한 연기)

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약 기간	2020. 3. 6. ~ 2020. 5. 14	************ *************	*****
계약 금액	***********	***********	변경 없음

바. 연장사유

: 코로나19 위기경보 격상에 따른 절차(자문회의, 승인 및 협의) 이행 지연으로 이에 대한 용역기간 연장 필요(연기 기한 : ‘20. 4. 10까지)

사. 연기사유 귀책 소재 : 서울특별시

아. 지체상금 부과 여부 : 미 부과

붙임 1. 용역 준공기한 연기 방침서

2. 용역 준공기한 연기 요청서(설계자)

3. 합의각서

4. 준공기한 연기 의뢰서.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	구선이		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	05/07 안중호
협조자
시행	한양도성도감-4964	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)