문서번호	설비부-6522
결재일자	2020.5.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	05/07 임정규
협 조

- 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사 -

물가변동(2회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사 -

물가변동(2회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

우리본부에서 추진 중인『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사』관련 물가변동으로 인한 계약금액 조정 사유로 감리사로부터 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토하고 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

지방계약법 제22조 및 동법 시행령 제73조(물가변동 등으로 인한 계약금액의 조정)

제2회 물가변동으로 인한 계약금액 조정요청 건 검토 보고

[탄천하감 제2020-95(2020.04.28.)호]

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

공사위치 : 강남구 개포로 625번지 일원 (탄천물재생센터 내)

계약현황

차수	계약금액(원)	준공(기성)액(원)	계약기간	비고
총차	*************	***********	*********************
1차	***********	***********	*********************	준공
2차	*************	*	*********************

도 급 사 : ㈜부경일레콤 외 2개사

감 리 사 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

Ⅲ
		검 토 내 용

계약금액 조정 조건 충족 여부충족요건

항 목	기 준	검 토 내 용	검토결과
기간요건	∘계약체결(직전조정일) 후 90일 이상 경과	∘직접조정일(기준시점) : 2018.09.01. ∘조정기준일(비교시점) : 2019.09.01. ∘경과기간 : 364일(‘18.09.01. ∼ ’19.09.01.)	충족
등락요건	∘지수조정율(K값) 3% 이상 증감	∘ 기간요건 충족일 이후 지수관련 물가 등 · 시중노임단가 : 대한건설협회(2019.09.01.) · 생산자물가지수 : 한국은행 발행(2019.09.01.) ∘ 기준일(2019.09.01.) K값 = 4.5% > 3.0%	충족
종 합	∘기간 및 등락요건 동시 충족	∘2019.09.01. 기준일은 기간과 둥락요건을 동시에 충족하므로 물가변동 조정기준일로서 적합	충족

물가변동 비대상 금액(공제금액)의 타당성 여부

항 목	기 준	검 토	검토결과
물가변동 적용 제외 공정률 (직접공사비 기준)	************* **********	************************************* ************************************ ************************************ *************************************	적정

※ 적용제외공정률 : 예정 및 실행공정률 중 최대치인 예정공정률에 기성공정률을 합산한 요율

계약금액 조정내용

구 분		금 액	검 토 내 용
대상공사금액		**************	도급계약서 사본 참조(총차2회변경액)
적용 제외금액		**********	의 금액에서 비율을 적용한 금액
물가변동 조정기준일 (현재 공정률)	예정공정률	******	예정 공정표 기준
	실행공정률	*****	실행공정표 기준
	제외공정률	******	예정 및 실행 공정률 최대값 반영
적용대상 금액		**************	= -
물가변동 조정률		*****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 조정금액		***********	= ×
선급금 공제금액		**	선급금 지급사항 없음
물가변동 조정 적용금액		***********	= -

물가변동으로 인한 계약금액 조정 금액                 [단위 : 원]

구 분	변경전	변경 후	증 · 감	비고
총차	*************	*************	***********	1회 E/S포함
1차	***********	***********	*	2019.12.10.준공
2차	*************	*************	***********	1회 E/S포함

※ 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 포함된 적용대상금액에 대해 준공 전 재검토 후 정산 시행

Ⅳ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

*********************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************

**********************************************************************************************

****************************************************************************************************

조치계획

**********************************************************************************************************************

붙임 1. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고[탄천하감 제2020-95(2020.4.28.)호] 1부.

2. ES(2회)보고서 1부.   끝.