“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰 (목동배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역)

우리사업소에서 시행하는『목동배수지~양천도서관간  장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역』에 대하여 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 목동배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역

나. 계약업체 : ***************

다. 계약금액 : ************

라. 용역기간

▶ 당초 : 2020.03.12 ~ 2020.05.10

▶ 변경 : 2020.03.12 ~ 2020.05.30

마. 연기사유

서울시에서 시행하는 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 일정이 용역기한         이후로 예정되어 있어 자문회의 최종심의시까지 과업기한 연장이 필요(최종심의        통과를 감안 20일 연장)

바. 귀책소재 : 강서수도사업소

사. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	강병국		급수관리팀장	주은선		급수운영과장	05/07 김정수
협조자
시행	급수운영과-9032	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3947	/전송		/		/	부분공개(6)