문서번호	급수운영과-9015
결재일자	2020.5.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강병국	주은선	05/07 김정수
협 조

용역 준공기한 연기 보고

(목동배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역)

2020. 05.

용역 준공기한 연기 보고

(목동배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역)

우리사업소에서 시행하는『목동배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역』에 대한 용역기한을 아래와 같이 연장하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		용 역 현 황

□ 용 역 명 : 목동배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역

□ 용역개요 : 목동중앙로 및 목동서로 교통소통대책 수립(1,390m)

□ 용역기간 : 2020. 3. 12 ~ 2020. 05. 10

□ 계약금액 : ************

□ 용역업체 : ***************

Ⅱ		실정 및 조치의견

◯ 당초 용역기한이 2020.5.10일이나 서울시에서 시행하는 도로점용공사장 교통

소통대책 자문회의 일정이 용역기한 이후에 예정(2020.05.14) 되어 있어 준공기한

연기가 불가피한 실정임.

◯ 자문회의 일정이 용역기간 이후에 예정되어 있으므로 자문회의 심의 통과시까지

과업기간을 연장코자 함(최종 심의통과를 감안 20일 연장)

▶당초 계약기간 : 2020.03.12 ~ 2020.05.10

▶변경 계약기간 : 2020.03.12 ~ 2020.05.30

◯ 귀책 사유 : 강서수도사업소

◯ 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅲ		행 정 사 항

◯ 행정지원과에 준공기한 변경계약 의뢰

◯ 용역업체에 준공기한 연장 계약 통보

붙 임   1. 계약기한 연장 요청 공문(용역업체) 1부.

2. 합의서 1부.  끝.