(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사

공사개요

· 위치 : 금천구 가산동 345-58번지

· 규모 : 지하2층/ 지상10층 6,017㎡

· 공사기간 : ´17.11.~´20.02.

· 도 급 비 : 6,862백만원

· 시공사 : ㈜예강건설산업 외2

· 감리단 : ㈜펨코엔지니어링 외1

· 설계사 : ㈜해천건축

실정보고 건명

기숙사 욕실 변경시공

실정보고 사유

설비 급배수 배관과 6,7층 하부 전이보의 간섭으로 인한 시공 및 유지관리 곤란으로 욕실위치 조정 및 내부배치 변경

건설사업관리단

검토의견

당 현장 기숙사 욕실의 변경시공 관련하여 설계자 및 시공자의 의견 등을 종합 검토한 결과 변경시공에 문제가 없는 것으로 사료됨

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	-	-	변경 없음
금액	-	-	변경 없음

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 ( ○ )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   ( 추가예산 확보 필요없음 )

추가 행정절차 이행 필요여부

필요 없음

발주처

검토의견

건축 보와 설비배관의 간섭으로 인한 욕실위치 조정 및 욕실 내부배치 변경사항으로 건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단됨

비 고

결재

주무관

정인호

환경시설과장

代김성권

건축부장

05/11

임인구

협조

주무관

조윤제

주무관

최소영