문서번호	교통운영과-7518
결재일자	2020.5.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★교통전문관		교통개선팀장	교통운영과장
박평근		김상훈	05/11 강진동
협조
	주무관		이현정

「2020년 도로점용공사장」교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제2차)

2020. 5.

교통운영과

「2020년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제2차)

제2차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회(소위원회)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2020.5.7.(목), 14:00~16:20

○ 참석 위원 : 4명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 3명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 박상섭 위원, 신치현 위원, 김정환 위원

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 5건

- 결  과 : 조건부 시행 5건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 구룡지하차도 종점부 방음터널 설치 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
양재대로	7개월	야간(22~06시)	1~3개차로	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 차로변경은 하위차로에서 변경이 가능하도록 테이퍼를 조정하기 바람

- 분석결과가 F 인 단계는 테이퍼 방향을 측도로 조정하여 교통량이 분산될수 있도록 하기 바람

- 우회도로 안내, 입간판 설치, 이동식 VMS 등을 설치하여 차량이 사전에 우회 할수 있도록 홍보 계획을 수립하여 시행하기 바람

- 8, 9단계는 2개차로 점유로 인하여 정체가 우려되므로 공사 시간을 1시간 늦추어 공사를 시행하기 바람

2) (강남8공구) 매헌지하차도 공사중 교통소통대책 변경

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
양재대로	12개월 ‘20.5~21.4	24시간	1~2개차로	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 공법 변경으로 인해 지체도 증가가 우려되므로 공사기간 단축과 지체도 증가로 인한 사회적 편익을 비교하여 제시하기 바람

- 11-1단계 양곡도매시장사거리 과천방향의 우회전을 직우로 변경하고 청계지하차도 방향 좌회전 차로를 추가하는 방안을 검토하기 바람

- 공사구간내 노면표시가 불량하여 사고 위험성이 높으므로 전면 재도색을 시행하기 바람

- 완공후 교통처리계획은 교통운영과와 협의하기 바람

- 트럭터미널 교차로에 정차금지대 노면표시를 추가하기 바람

- 13-2단계 트럭터미널교차로의 수서방향 차로를 선형을 조정하기 바람

- 16단계 차로 선형을 조정하고 좌회전과 유턴차로를 분리 운영하는 방안을 제시하기 바람

- 모든 단계 미들블럭 유턴운영시 신호등 및 안전표지판을 설치하여 운영하기 바람

- 17단계의 공사구간의 가각을 정리하기 바람

3) 창신숭인 도시재생선지역 노후하수관로 종합정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로 (점용폭)	사업 시행자
지봉로	‘20.5~8 (106일)	야간 (22~06)	1~2개차로	종로구청 치수과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 7단계 북측 접근로를 1개차로 차단후 접근로 용량을 증대시키는 방안을 검토하기 바라며, 공사시간을 1시간 늦추어 공사를 시행하기 바람

- 교차로 분석결과를 재검토하고 단계에 신호 현시를 추가하기 바람

- 사전에 차로 차단구간은 라바콘으로 처리하기 바람

- 2단계 주차장 출입구는 최소 3m를 확보하기 바람

4)  중앙지사 열수송망 성능 보강공사(1단계)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
신반포로	‘20.5 ~6 (50일)	야간(22~06시)	2개차로	한국지역난방공사 중앙지사

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 2, 4단계 공사시 버스 통행시 사고 위험성이 있으므로 버스는 교대통행을 검토하기 바람(모범운전수를 통제수로 배치하고, 4명이상)

- 2, 4단계 공사시 교대통행 전략을 자세하게 수립하기 바람(노선별 막차 시간, 시간대별 방향별 예상 교통량 등을 조사하여 교대통행에 대한 운영전략 수립, 공사시간 선정 등)

- 3단계 잠원방향 직진차로를 사전에 1개차로를 차단하여 버스와 충돌이 발생하지 않도록 공사를 시행하기 바람

- 내용 보완후 지정위원(*** 위원) 검토를 받기 바람

5)  강동수도사업소 송배수관 정비공사(백제고분로, 올림픽로)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
백제고분로	‘20.5 ~12 (84일일)	야간(22~06시)	2개차로	강동수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 백제고분로만 조건부 시행

- 올림픽로는 공법이 변경되었으므로 재상정하기 바람

- 2-1단계는 1-2단계처럼 차로운영 계획을 재수립하기 바람

- 모든단계에서 테이퍼는 최대한 연장하기 바람

- 백제고분로는 주간시간대 교통량이 적고, 주거지가 밀집되어 있으므로 야간 공사시 소음 등의 문제가 우려되므로 주간시간대로 공사를 시행하는 방안을 검토하기 바람(교차로 공사는 야간 공사 시행)

- 3-1, 8, 9단계는 대향차로 이용을 검토하기 바람

- 6-1, 6-2단계는 차로 선형을 직선으로 조정하기 바람

붙임 : 1. 자문위원 참석명단 1부.

2. 공사업체 참석명단 1부.  끝.