문서번호	급수운영과-7309
결재일자	2020.5.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김태승	이일로	05/11 이용구
협 조

설계변경 검토보고

(시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사)

2020. 5. 11. (월)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고

(시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사)

「시흥동 999번지 일대 외 3개소 배급수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함.

※추진근거: 공사감독2처-5925(20. 5. 8.) “설계변경(정산) 보고서 제출(시흥동999번지)”

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시흥동 999번지 외 3개소 배급수관 정비공사

○ 계약기간 : 2019. 9. 18. ~ 2020. 5. 20.

○ 계 약 자 : ****************

○ 계약금액 : *************

○ 공사개요 : D=80~300㎜, L=1,609m

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제39호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-7(계약금액의조정)”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 상수도 공사의 특수성으로

신규공종, 자재 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「콘크리트포장깨기」외 130개 공종

- 신규사급자재 : 「주름마디 스테인레스강관(D=20mm)」 외 37개 자재

- 물량증가 : 「아스팔트 포장절단기」 외 87여개 공종

- 물량감소 : 「콘크리트 포장깨기」  외 93여개 공종

○ 주요 설계변경 사유(공단 실정보고 사항)

- “설계누락공종 및 수량반영”       「급수운영과-1230(20.1.21.)」

- “무단수차단공법(라인스토핑)”               「급수운영과-4668(20.3.24.)」

- “압입공종 제외 및 하수암거구간 상월조치”     「급수운영과-6084(20.4.17.)」

- “2구간 일부도종 및 장비규격 변경”         「급수운영과-6072(20.4.16.)」

- “2구간 연결부 야간 시행”                  「급수운영과-6072(20.4.16.)」

- “2구간 연결부 굴착, 폭, 연장 및 심도증가”   「급수운영과-6072(20.4.16.)」

- “4구간 굴착 폭 및 심도 증가”              「급수운영과-6072(20.4.16.)」

- “2, 4구간 가정인입부 공종 누락”           「급수운영과-6072(20.4.16.)」

- “설계누락 공종 및 수량 반영”              「급수운영과-6082(20.4.17.)」

-  “횡단굴착 개소 증가”                      「급수운영과-6660(20.4.28.)」

-  “1구간 일부지점 굴착 폭, 심도 증가”        「급수운영과-6660(20.4.28.)」

-  “1구간 일부지점 폐기물 증가“              「급수운영과-6660(20.4.28.)」

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	**********
도 급 비	***********	***********	***********	******

○ 공사개요 변경

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	******************* *********	******************* *********	********* *********

○ 주요 신규공종, 자재 및 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
잔토처리(0.7 상차비별도)	24DT, 집하장->매립지(43.5km)	㎥	401	2463	***********
인력터파기	견질토사 1-2m, 야간	㎥	8	138	***********
주철(이형관)부설공	300mm(야간)	개소	145	228	***********

공 종(자재)	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
라인스토핑	D=400mm	개	신규	1	************
주철관 절단공(절단기사용)	300mm(야간)	개소	70	106	***********
교통정리원	야간	인	33	46	**********
싸인보드카	야간	HR	198	276	***********
부단수할정자관	200/200mm	개	신규	1	************
KP 이탈방지압륜 접합	300mm, 야간	개소	4	290	************

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 검토보고(공단) 및 갑지(공단) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약조정검증 확인증 1부.  끝.