문서번호	시설과-1538
결재일자	2020.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	조민형	05/11 박종수
협 조

천호·길동 공원 와이파이 설치계획

2020. 5.

동부공원녹지사업소

(시설과)

천호·길동 공원 와이파이 설치계획

천호ㆍ길동생태 공원 내에 공공와이파이존을 설치하여 공원을 찾는 시민들이 편리하게 와이파이를 사용할 수 있는 환경을 조성코자 함.

1		사 업 개 요

❍ 사 업 명 : 천호ㆍ길동 공원 와이파이 설치

❍ 위    치 : 천호공원(강동구 올림픽로 702)

길동공원(강동구 천호대로 1291)

❍ 사업기간 : 2020. 5. ～ 6.

❍ 사업내용 : 무선 인터넷 공유기(AP) 3대

❍ 사 업 비 : 20백만원(공사 20백만)

- 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원

이용서비스만족도향상, 공원유지관리및이용활성화,공원내공공와이파

이설치, 시설비

❍ 현황사진

천호공원 야외무대(구조물 상단에 AP 2개)	길동공원 입구 광장(광장 안 카메라폴에 AP 1대)

2		추 진 계 획

❍ 설치대상

구분	천호공원	길동공원
AP 수	지향2	무지향1
주요시설	신설관로 60m	지중관로 60

- 공원 내 다수 시민의 이용장소 및 기존 광선로(CCTV용) 사용 여건을 고려하여 와이파이 설치 장소 결정

❍ 공    사

- 계약방법 : 일반수의 계약

ㆍ 근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1

항 제5호 가목

ㆍ 사  유 : 본 과업은 추정가격이 소액으로, 건설산업기본법에 의한 정보통신공사

업으로 등록된 업체로, 와이파이 등 통신공사 경험이 풍부한 업체로서

최저가 견적 제시 전문업체 선정

- 공사기간 : 착공일로부터 30일

3		추 진 일 정

❍ ‘20. 4. ~ 5. 15     : 현장조사 및 설계

❍ ‘20. 5. 18 ~ 5. 22 : 설계심의(공원녹지정책과)

❍ ‘20. 5. 25 ~ 5. 29 : 예산재배정 요청(공원녹지정책과)

❍ ‘20. 6.  1 ~ 6.   5 : 공사발주

❍ ‘20. 6.  8 ~ 6. 30 : 공사시행 및 준공

4		행 정 사 항

❍ 예산 수시 재배정 요구(→공원녹지정책과)

❍ 공사발주 의뢰(→공원운영과)

붙임  인터넷공유기 위치도 1부.  끝.