문서번호	조경과-6810
결재일자	2020.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		김병완	전결 05/11 문길동
협조

2019년 가로변 녹지량 확충사업

예산 추가 재배정 요청 검토 보고

푸른도시국

(조경과)

-2019년 가로변 녹지량 확충사업-

예산 추가 재배정 요청 검토 보고

중랑구에서 ‘2019년 가로변 녹지량 확충사업’ 추진과 관련하여 예산 추가 재배정 요청이 있어 검토하고 보고합니다.

[관련대호 : 중랑구 공원녹지과-10164호(2020.05.06.)]

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 2019년 가로변 녹지량 확충사업

❍ 위    치 : 망우역 교차로 교통섬 녹지(상봉동 160-2일대)

❍ 기    간 : 2020.01.28.~2020.5.26.

❍ 총공사비 : 264,955천원(도급비 240,512, 관급자재 17,669, 상수도인입비 6,774)

❍ 내    용 : 교통섬 녹지 및 가로녹지 개선(수목 식재, 수경시설 등)

❍ 시 행 처 : 중랑구청(공원녹지과)

2		추진과정

❍ 2019. 7.     : 2019년 추경사업 추진계획 수립 및 시달(서울시)

❍ 2019.11. 1. : 대상지 변경(신내인터체인지 녹지→망우역 교통섬 녹지)

❍ 2019.12. 3. : 설계심의

❍ 2019.12.27. : 공사착공

❍ 2020. 1.10. : 2019년 회계연도 사고이월사업 확정(예산담당관)

❍ 2020. 1.20. : 사고이월비 재배정(298,526천원)

❍ 2020.5월 현재 : 조경공사 중(공정율 85%)

3		현안사항(중랑구 요청사항)

❍ 주민·경찰서 요구사항 반영, 수도인입 수수료 납부에 따른 추가 소요예산 지원 요청

- (주민 요구) 다채롭고 풍성한 식물과 개성있는 주제 정원으로 조성

- (경찰 요구) 교통량이 많은 지역으로 안전사고 대비 안전시설 설치

- (수도 인입) 상수도 원인자부담금 외 수도 인입에 따른 공사비 증액

❍ 개략공사비 산출내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증△감
총공사비		264,955,440	322,565,720	47,390,370
도급액	공급가액	218,647,155	235,209,091	16,561,936
	부 가 세	21,864,715	23,520,909	1,656,194
	소 계	240,511,870	258,730,000	18,218,130
관급자재비		17,669,570	41,538,210	23,868,640
상수도인입비		6,774,000	12,077,600	5,303,600

❍ 추가 소요예산 확보 방안(중랑구)

- 추가 소요예산          : 47,390,370원

- 조경사업 낙찰차액 사용 : 18,000,000원

- 추가 지원요청 금액    : 30,000,000원

4		검토 의견

❍ 2019년 회계년도 이월사업으로 주민 요구사항과 교통사고 예방시설 설치, 수도인입에 소요되는 예산을 요청한 것으로 공사의 완성도와 품질 향상, 안전성 확보차원에서 예산 지원이 필요함

❍ ‘20년 가로변 녹지량 확충사업 예산에서 추가 지원요청 금액(30백만원)을 재배정하여 준공기한 ’20.5.26. 내에 완료하게 하고자 함

붙임 : 예산 추가 재배정 요청서 1부.  끝.