코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서대문구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	2019년 『서울 구 서대문형무소』 보수정비(배면부 등) 설계 변경(1차) 승인 통지

1. 서대문구 문화체육과-28759(2019.9.18.), -14668(2020.5.06.) 및 서울시 역사문화재과-18620(2019.10.7.)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여, 서대문구에서 2019년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 사적 제324호 『서울 구 서대문형무소』보수정비(배면부 등)사업을 위해 작성된 설계도서에 대하여 다음과 같이 설계 변경 승인(지방검토)하오니 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2019년 『서울 구 서대문형무소』 배면부 등 정비공사

나. 사업기간 : 2020. 3.02. ~ 2020. 7.01.

다. 사업예산 : 금330,000,000원(국 231,000천원, 시 99,000천원)

라. 사업비용 : ********************************************

- 설계비 : *****************************************

- 공사비 : ********************************************

- 감리비 : ****************************************

마. 사업내용 : 석축, 경사면, 배수로 보수정비

바. 설계변경내용 : 시공물량 증·감(금액 변경 없음)

- 계약금액 조정 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	***********	***********	*	********
도 급 비	***********	***********	*	********
관 급 비	*	*	*
이설비 및 기타	*	*	*

사. 변경사유 : 자문회의(제1차) 결과 반영 및 현장여건에 따른 시공물량 증·감으로 설계변경.

붙  임  설계변경승인서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김민석		문화재사업팀장	신혜숙		역사문화재과장	전결 05/11 권순기
협조자
시행	역사문화재과-9120	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층 (서소문동)	/
전화	02-2133-2633	/전송	02-2133-1062	/	no7msk@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)