문서번호	시설보수과-3968
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		代윤동원	05/12 박문희
협 조
	관리단속과장			박종윤

목동교 보수공사 -

발주계획 검토 보고

2020. 5.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

[시설보수과]

목동교 보수공사  -

발주계획 검토 보고

2020년도 예산사업으로 추진중인 『목동교 보수공사』에 대한 실시설계 완료후 발주계획 검토 보고 임

Ⅰ		발주개요

□ 공 사 명 : 목동교 보수공사

□ 위    치 : 영등포구 양평동 57 ~ 양천구 목동 174

□ 사업개요 : 거더보강(구교) 21개소, 받침교체(신교) 111개소 등

□ 사업기간 : 착공일로부터 180일

□ 총공사비 : 1,108백만원(재난관리기금)

Ⅱ		추진사항

□ 추진사항

○ 정밀안전점검용역 시행 : ‘19. 3. 25 ~ ’20. 2. 28

- 상태평가 : C등급

- 목동교(구교) 거더처짐 및 균열발생으로 조속 외부강선 보강 등 필요

- 목동교(신교) 교량받침부 파손 및 수축여유량 부족(노후)으로 보수 필요

○ 2020년도 예산반영을 위한 사업설명서 제출 : 2019. 7. 11

- 요구액 : 1,108백만원

○ 목동교 보수공사 실시설계용역 추진

- ‘20. 1. 08 : 실시설계용역 추진방침(시설보수과-193호)

- ‘20. 2.6 ~ 5.5 : 실시설계용역 시행(용역준공 : ’20. 5. 6)

- ‘20. 2. 24 : 특정기술 선정심의 개최

[강선보강공법, 교량인상공법, 교량받침제품(관급자재)]

○  ‘20. 3. 13 : 재난관리기금 심의결과 통보 - - - 배정액(1,108백만원)

○  ‘20. 5. 07 : 계약심사 결과 통보(감 4,140천원)

○ 실시설계 총 사업비 : 1,204,860,000원

- 도급비 : 1,093,050,000원. 관급비 : 109,213,000원. 이전비 : 2,597,000원

○ 일상감사 검토 : 비대상

※ 목동교 보수공사 : 총 1,108백만원(도급비 : 1,093,050천원)

(도급비 = 공급가액 993,681,819원 + 부가세 99,368,181원)

※ 일상감사 : 추정가격 10억이상이 대상이며 본 공사는 공급가액이 10억 미만으로 일상감사 비대상임 – 별첨 대상사업

[추정가격 : 부가세와 관급자재비 등을 제외한 금액]

Ⅲ		세부추진계획

□  발주방법

○ 제한경쟁입찰(지역) : 추정가격 10억미만 전문공사

※ 행정안전부 예규 제90호(2019.10.8.)

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제4장(제한입찰 운영요령)

□  입찰참가자격

○ 건설산업기본법 시행령 제7조에 의한 시설물유지관리업 등록업체

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법시행

규칙 제14조 규정에 의한 참가자격을 갖추고, 입찰공고일전일부터 입찰일

(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 자.

□  예산확보 및 조치방안

○ 목동교 보수공사는 실시설계 결과 총사업비 1,204,860천원이 소요되는 공사로서 현재 가용액은 1,103,860천원(계약심사 절감 4,140천원)으로 101,000천원(관급자재비)이 부족한 실정임.

○ 공사의 시급성을 감안하여 현재 확보된 예산으로 즉시 공사발주(도급비)하고 부족한 관급자재비는 공사의 낙찰차액을 사용하여 구매하고자 함.

○ 예산사용 방안

구 분		설계내역	공사발주	부족예산	조치계획
총공사비		1,204,860,000	1,103,860,000	101,000,000	(심사절감)
도 급 비	공급가액	993,681,819	993,681,819	0	일상감사제외
	부가세	99,368,181	99,368,181	0
	계	1,093,050,000	1,093,050,000	0	낙찰차액발생
관급자재비		109,213,000	8,213,000	101,000,000	낙찰차액사용
이 전 비		2,597,000	2,597,000	0

○ 예산과목 : 재난관리기금재난계정, 재난예방 및 복구, 재난예방, 시설비(목동교보수공사)

Ⅳ		향후계획

□ 2020. 05월 : 공사 발주

□ 2020. 06월 : 공사 착공

□ 2020. 12월 : 공사 준공

따로붙임 : 1) 위치도 및 현황사진 1부.

2) 계약심사결과(내역서) 1부.

3) 설계내역서(공사발주) 1부.

4) 특허관련 협약서 2부.

5) 일상감사 대상사업 1부.  끝.