문서번호	한양도성도감-5117
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		정일선	05/12 안중호
협 조

1차 공사 실정보고 검토결과 보고(제10회)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

문  화  본  부

(한양도성도감)

1차 공사 실정보고 검토결과 보고(제10회)

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관」조성공사와 관련하여 해당 감리자로부터 제출된 실정보고 사항에 대한 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공사명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 조성공사

□ 위  치: 중구 소파로 46외 13필지(43,630㎡)

□ 계약금: 3,528,933,000원

□ 공사기간: 2018.11.23. ~ 2021.2.16. (1차 2020.6.19.)

□ 시공자: 원택건설(주) 대표 ***, 명헌건설(주)

□ 감리자:(주)금성종합건축사사무소 대표 **************

Ⅱ		실정보고 내용

□ 실정보고 근거

- 공사계약 일반조건 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

□ 실정보고 사유

- 현장내 조경공사 및 지반조성공사중 지중에 매립된 소각폐기물이 발생하여 폐기물처리가 필요함

- 폐기물 종류: 보호각 남측경사지 하부 매립폐기물, 방공호 주변 천막 및 마대 등

□ 감리자 검토의견

- 현장내에서 발생한 폐기물 처리가 공정상 시급하므로 시공자와 변경계약을 통해 처리토록 하고, 반출량은 폐기물 소각장에서 발부한 계근표를 제출받아 준공 시 소각처리 단가로 물량정산함이 타당함

Ⅲ		처리의견

□ 지하에 매립되어 발굴된 소각폐기물은 예상하지 못한 폐기물이며 폐기물 처리를 위해 우리시에서 소각폐기물 처리용역을 추가로 발주하여야 하나 현재의 공정상 신속한 처리와 10톤 내외의 소량이므로 시공자가 폐기물처리 업체에 위탁·처리토록 하고 향후 설계변경 절차에 따라 설계변경 처리하고자 함

□ 소각폐기물 처리에 따른 비용은 향후 폐기물처리업체의 물량 반출 시 계량 근거자료를 확인·정산하고자 함

※ 우리시에서 직접 발주하여 계약한 건설폐기물은 폐콘크리트 및 혼합건설폐기물(소각 5%이하), 식물성 잔재류이고 소각폐기물은 없음(처리량은 413톤)

기존 계약업체(남부이엔티)는 소각폐기물 처리가 불가한 업체이므로 변경계약이 어렵고, 새로운 폐기물처리 업체와 신규계약을 위해서는 약 1개월이상 소요됨

붙임: 감리원 검토의견서 및 시공자 실정보고서 1부.  끝.