문서번호	토목부-9295
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	05/12 김용제
협조

교량 점검시설 추가 설치 검토 보고

【강남순환도시고속도로 4공구 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

도시기반시설본부

토 목 부

교량 점검시설 추가 설치 검토 보고

【강남순환도시고속도로 4공구 건설공사】

공용 개시된 시설물의 이관을 위한 합동점검 결과 관련 부서(도로시설과)에서 호암대교 등 교량 유지관리를 위한 점검시설 추가 설치 요청 사항을 반영하고자 보고 드림.

1		공사개요

❍ 위    치 : 금천구 독산동~소하JCT

❍ 규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍ 도 급 액 : 202,020백만 원

❍ 사업기간 : ’01. 12. 29. ~ ’20. 5. 31.

❍ 시공사/감리단 : 롯데건설(주) / ㈜서영엔지니어링

2		보고내용

❍ 강남순환 4공구 준공을 위한 공용 개시된 시설물 합동점검 결과 관련 부서(도로시설과)에서 호암대교 등 유지관리를 위한 교량 점검 시설 추가 설치 요청 사항을 반영하고자 함.

❍ 호암대교 등 램프 교각은 전체 36개소 중에 설계 수량에 반영되어 설치한 교량 점검시설은 24개소이고 합동점검 결과 유지관리 부서에서 점검을 위한 교량 점검시설 12개소 추가 설치 요청이 있으나, 이동식 점검 차량 접근성 여부 등을 검토 및 협의한 결과 추가로 8개소에 대하여 교량점검시설을 설치하고자 함.

- 교량 점검시설 미설치 4개소 [UP Ramp(P3), Down Ramp-A (P7, P8), Down Ramp-B(P6)]

❍ 위치도

❍ 수량 현황

공종		규격	단위	수량	비고
교량점검시설	호암대교	P11	개	1
	UP Ramp	P2	개	1
	Down Ramp-A	P3~P6, P11	개	5
	Down Ramp-B	P5	개	1

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	-	146,188	146,188
제경비	-	41,412	41,412
계	-	187,600	187,600

3		조치계획

❍ 교량 유지관리 부서 요청 사항을 반영한 교량 점검시설 추가 설치에 대한 책임건설사업관리기술인의 실정보고 내용은 적정하므로 승인처리하고 설계변경에 정산 반영하고자 함.

❍ 단가적용

- 신규단가에 대해 계약상대자와 성실히 협의를 하였으나 이견이 있어 당초 협의율(82.25%) 적용(※ 낙찰률 69.28%)

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.