“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(탈수기동 세정수배관 및 창호 교체공사)

우리 정수센터에서 시행중인 『탈수기동 세정수배관 및 창호 교체공사』에 대하여 아래 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 탈수기동 세정수배관 및 창호 교체공사

2. 도 급 자 : ㈜세이크엠이씨 대표 권오민

3. 계 약 일 : 2020. 03. 09.

4. 공사기간 : 2020. 03. 16 ~ 2020. 07. 13.

5. 설계변경(정산)내용

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공급가액	142,386,480	142,170,000	감)216,480
	부 가 세	14,238,640	14,217,000	감)21,640
	합 계	156,625,120	156,387,000	감)238,120

6. 변경사유 : 물량 변동 반영 및 제경비 확인서류 미제출 정산

7. 예산과목 : 기계장치, 정수장시설정비, 시설비및부대비

붙임 1. 설계변경심의결과보고  1부.

2. 변경설계내역서  1부.

3. 계약금액조정 검증확인서  1부.

4. 산업안전관리비 검토결과서  1부.

5. 고용산재보험 납입증명서  1부.

6. 국민연금 납부 확인서  1부.

7. 안전관리비 사용내역  1부.

8. 합의서  1부.  끝.

주무관	임근식		정수시설과장	백상희		강북아리수정수센터소장	05/13 신동호
협조자	주무관	김금옥		주무관	류혜영
시행	정수시설과-1455	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터 정수시설과	/
전화	0231465873	/전송		/		/	부분공개(5)