문서번호	교육정책과-7942
결재일자	2020.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
교육시설지원팀장	교육정책과장
최연호	05/13 박기용

2020년 상반기 3차 서울캠핑장 시설 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교육정책과

(2020년 상반기 3차)

서울캠핑장 시설정비 계획

서울캠핑장의 열악한 시설을 1,2차 개선후 점검결과 추가 보완개선이 필요하여 3차 시설 정비로 캠핑장 개장에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 서울캠핑장 운영혁신 계획(2019.11.28. 교육정책과-18499)

○ 서울캠핑장 시설개선 계획(2020. 1.17. 교육정책과-1033)

○ 2020년 서울캠핑장 운영계획(2020. 2. 7. 교육정책과-2115)

○ 시설개선을 위한 지역우수업체 추천 요청(2020. 2.11. 교육정책과-2398)

※ 1차 시설 정비계획(’20. 3.12.), 2차 시설 정비계획(’20. 3.30.)

□ 개선방법

○ 지역경제 활성화와 사후 유지관리 효율성을 위해 캠핑장 소재 지역업체를 통한 개선

※ 캠핑장 이용객의 지역경제 활성화에 따라 캠핑장 관리에 소명감을 가진 지역 영세 업체 활용

- 현장 점검결과 지역 주민 및 업체에서 자발적으로 유지관리해주는 사례 다수 확인(동네 창고·특산물 무상 제공, 화단 정비, 울타리 무상 설치, 장비 무상제공 등)

○ 지역의 열악한 영세업체, 정비가능 업체의 희소성을 감안하여 소액의 경우 수의계약이 아닌 일반지출 등으로 개선

- 대부분의 업체가 영세하여 수의계약을 위한 설계서 작성 능력이 없으며, 부득이한 경우 설계사무소 등을 통해 설계서 작성과 계약을 대행하고 있어 수익성이 떨어져 정비를 기피하고 있으며, 공사비 인상 제시 우려

- 정비 내용이 시설물 단순 유지보수로 지역 소규모 업체에서 충분히 정비 가능

□ 그간의 추진실적

○ 1,2차 총 58건(336,606천원) 개선

(단위 : 건,천원)

구분	건수	금 액	수의계약 현황
계	58	336,606	8건(188,132)
1차	40	216,291	6건(152,677)
2차	18	120,315	2건 (35,455)

▶ 캠핑장별 개선 현황

계	횡 성	포 천	제 천	철 원	함 평	서 천	봉 화	상 주
58건	11	15	7	5	5	5	2	8
336,606	118,870	68,295	20,619	46,000	26,163	26,663	5,217	24,779

· 각종 안내사인 정비는 통일된 디자인 도출후 개선 예정(디자인정책과 협조)

○ 1,2차 정비 결과 문제점 및 개선방안

- 캠핑장 소재지가 지방 산간에 위치하여 정비업체 발굴의 어려움 상존

· 도심권 업체는 원거리에 있는 캠핑장의 소액 시설정비 기피, 요청할 경우 별도 운반비·출장비 등이 소요되어 별도 추가 부대비용이 지출이 상당함

· 도심권 업체 정비가 가능하도록 상당한 정비물량이 도출될 때까지 시설 개선을 보류할 경우 시설 안전관리와 이용객 불편 초래

- 소규모 시설 정비의 경우 시설비를 집행하여 정비함이 적정하나 재무회계 규칙상 시설비는 계약에 의한 발주만 가능하다는 소관부서(재무과) 의견으로, 영세 지역 업체의 계약절차 이행 불가로 시설개선 한계

※ 계약방법: 업체의 조달청 등록, 건설업면허 취득, 설계서 작성, 계약 이행...

☞ 3백만원 이하 소규모 정비는 견적에 의하되 계약절차 생략하고 사무관리비를 집행하여 캠핑장 운영관리에 착오 없도록 추진

※ 캠핑장 시설의 경우 건물, 토목 등 주요 시설 이외 각종 부수 시설물, 물품, 캠핑객 이용을 위한 주변 환경개선은 캠핑장 본래의 사무(캠핑장 운영) 이행을 위한 필수적인 분야이므로 사무관리비 집행이 가능할 것임

□ 3차 개선물량

○ 총 계 : 31개 분야 128백만원

(단위 : 건 / 천원)

계	횡 성	포 천	제 천	철 원	함 평	서 천	봉 화	상 주
31	3	2	2	4	10	0	5	5
128,510	53,000	8,400	1,450	8,340	19,400	0	19,980	17,940

※ 포천캠핑장 교사동 및 노후 건물 정비는 공개경쟁입찰로 별도 추진

▸ 예산과목 및 정비방법

(단위 : 천원)

구분	소요예산			정비방법
	계	시설비	사무관리비	계	수의계약	일반지출	일상경비
건수	31	4	27	31	1	1	29
금액	128,510	55,600	72,910	128,510	53,000	2,600	72,910

□ 추진일정

○ 수의계약 물량 발주 : ’20. 5.15.까지

- 정비기간 : 착공일로부터 20일로 조기 완료하여 캠핑장 개장 준비 만전

○ 소액 일반지출 정비 : ’20. 5.29.까지

○ 개선결과 일제 점검 : ’20. 6.19.까지

- 코로나19 관련 출장 자제 지침에 따라 미점검 1,2차 포함 점검 실시

※ 매년 실시하는 합동점검은 코로나19로 인하여 실시를 보류하되 서울시 자체 시설 개선결과 점검 시 시설 안전 점검 병행 실시

· 관련 기관(소방, 전기 등) 점검은 기관별 가능 일에 점검 협조 요청하고, 점검결과 개선 필요사항은 접수하여 개선

□ 향후계획

○ 계약에 의한 발주 이외 소규모 개선은 별도 방침서 없이 자체 개선 추진

□ 주요 개선 내역

⓵ 횡성캠핑장 교사동·관리동·야외무대 정비

필 요 성	- 교사동 교실, 복도, 천정, 바닥 등의 노후도가 심하여 안전 및 미관 저해- 남녀 화장실 타일 파손, 창고 노후 열악 운동장내 야외무대 천정이 없어 우천 및 햇빛에 취약
정비내용	- 교사동 교실·복도의 천정·바닥, 주출입구 정비 남녀 화장실 파손 타일 보수, 창고 천정·바닥 정비, 출입구 캐노피 설치 야외무대 지붕 시공
수의계약 사 유	금액이 소액이고, 캠핑장 인근 소재 우수 여성기업과 계약을 체결하여 시설 개선 및 사후관리에 만전을 기하고자 함
소요예산	53,000천원(부가세 포함)
예산과목	학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성운영, 시설비(401-01)
정비기간	착수일로부터 20일

⓶ 포천캠핑장 교사동 지붕 보강, 부수시설 철거 및 샤워실 설치

필 요 성	- 우천시 교사동 지붕에서 누수현상 발생(‘14년 정비후 노후됨) - 샤워실이 화장실 내에 있어 위생 불량, 사용 불편 호소 교사 뒤편 식당(샌드위치 판넬), 관사(30년 이상된 벽돌조)가 노후되어 사용상 안전이 우려되고 방치되어 있어 정비 필요
정비내용	- 교사동 비가림 지붕 설치(방수 공사보다 저렴, 장기간 유지, 하중 덜받음) 미사용 노후 식당·관사 철거후 해당 부지에 샤워실 신축 교사동 복도 바닥 등 환경 정비
정비방법	추후 예산 사정을 고려하여 공개경쟁입찰에 의한 정비 (동부녹지사업소 의뢰)
소요예산	미정(약 2억여원 소요가 예상되나 정비물량 현장 조사후 도출) · 추정예산: 지붕설치 5천만원, 건물철거 및 화장실 신축 15천만원
예산과목	학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성운영, 시설비(401-01)
정비기간	미정
관련현황	화장실내 샤워실	철거대상 건물 위치

【붙임】

3차 시설개선 물량 내역

▢ 캠핑장명 : 횡성캠핑장                                  (단위 : 천원)

건 명	내 용	소요예산	정비방법
교사동 및 화장실 등 개선	-교사동 교실·복도 천정, 바닥 정비, 출입구 정비	53,000	수의계약(시설비)
	-화장실, 창고 정비 및 캐노피 설치
	-야외 무대 지붕 설치

▢ 캠핑장명 : 포천캠핑장                                   (단위 : 천원)

건 명	내 용	소요예산	정비방법
교사동 지붕 설치	건물 방수를 위한 지붕 설치 (옥상 방수보다 예산 절감)	미정 (200백만원 추정)	일괄 경쟁 입찰 정비 (동부녹지사업소 의뢰) ※추정가(시설비) -지붕 50백만원(강판 씌움) -철거신축 150백만원
교사동 뒤편 노후건물 철거	노후 방치 센트위치 판넬 창고, 관사 철거
샤워실, 창고 신축	화장실 내 샤워실을 철거 창고 부지 활용 신축(창고 포함)
화장실 정비	화장실 파손 타일 등 정비
교사동 복도 바닥 정비	노후 훼손된 바닥 정비
화단 화초 보강 식재	화단 및 유휴부지 화초 식재	3,000	일상경비(사무관리비)
체험교실 정비	도서 비치 책장, 의자 등 교체	5,400	일상경비(사무관리비)

▢ 캠핑장명 : 제천캠핑장                                   (단위 : 천원)

건 명	내 용	소요예산	정비방법
체험교실 정비	체험 및 휴게 데크 천막설치	500	일상경비(사무관리비)
흔들의자 구입, 대문 정비	캠핑 어린이용 흔들의자 구매 대문 방부목 보강	950	일상경비(사무관리비)

▢ 캠핑장명 : 철원캠핑장                                   (단위 : 천원)

건 명	내 용	소요예산	정비방법
건물 주변 쇄석 보강	흙으로 도포된 일부 부지에 쇄석을 깔아서 통행 편의 도모	2,500	일상경비(사무관리비)
화장실 정비	화장실내 거울 등 교체	740	일상경비(사무관리비)
교실내 전등 보강	어두운 교실내 전등 보강	2,500	일상경비(사무관리비)
그네식 의자 구입	어린이용 흔들의자 구입(3개)	2,600	일반지출(시설비)

▢ 캠핑장명 : 함평캠핑장                                   (단위 : 천원)

건 명	내 용	소요예산	정비방법
옥상 방수 정비	누수 옥상 부분 정비 (자재 구입 직접 보강)	1,600	일상경비(사무관리비)
체험장 보강	토끼우리, 농촌 체험 재료 보강 주출입구 잡석 시공 등	2,500	일상경비(사무관리비)
교사동 난간 보강	부식이 잦은 외부 난간 강판 보강	2,900	일상경비(사무관리비)
벤치 제작 설치	캠핑객 휴식용 벤치 제작	1,500	일상경비(사무관리비)
트램폴린 부품 교체	어린이 놀이용 방방이 매트 교체	800	일상경비(사무관리비)
화단 정비	스텐드 주변 화단 보강 정비	2,600	일상경비(사무관리비)
개수대 보강	개수대 스테인레스 커버 보강	400	일상경비(사무관리비)
모래놀이장 비가림	우기시 모래 유실 방지 및 자외선 차단	1,900	일상경비(사무관리비)
교사동 뒤편 배수로 정비	동물우리, 체험장 배수로 신설	2,200	일상경비(사무관리비)
복도, 교실 정비	수묵화 및 동양화 작품 전시	3,000	일상경비(사무관리비)

▢ 캠핑장명 : 봉화캠핑장                                   (단위 : 천원)

건 명	내 용	소요예산	정비방법
데크 정비	오일스텐 도포	300	일상경비(사무관리비)
캠핑장 안내판 교체	진입도로 입구 안내판 교체	780	일상경비(사무관리비)
관리실 데스크 설치	개방된 관리실 안내데스크 설치	3,000	일상경비(사무관리비)
휴게 벤치 구입	흔들의자, 벤치 구입	2,400	일상경비(사무관리비)
데크 그늘막 설치	햇빛, 빗물 방지 그늘막	13,500	일반지출(사무관리비) 직접 시공시 일상경비

▢ 캠핑장명 : 상주캠핑장                                   (단위 : 천원)

건 명	내 용	소요예산	정비방법
족구장 정비	휀스, 마사토 등 보강	1,240	일상경비(사무관리비)
외문 정비	출입문 보강(휀스설치 등)	400	일상경비(사무관리비)
흡연구역 설치	별도 흡연구역 설치	1,300	일상경비(사무관리비)
산책길 진입로 보강	캠핑장 연계 산책길 진출입로 데크 설치	3,000	일상경비(사무관리비)
농촌 체험전시실	학교, 농촌을 체험할 수 있는 교실 정비	12,000	일상경비(사무관리비) -분야별 분리 정비