문서번호	한양도성도감-5171
결재일자	2020.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
백영기	정일선	05/13 안중호
협 조

남산 회현자락 유적전시관 통신공사

설계변경 및 물가조정에 대한 검토보고

2020. 5.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

남산 회현자락 유적전시관 통신공사

설계변경 및 물가조정에 대한 검토보고

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사(통신)」와 관련한 실정보고 승인(한양도성도감-4812)에 따른 설계변경 및 물가상승에 따른 계약금액 변경에 대하여 처리하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성(통신)

□ 위    치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)

□ 공사내용

· 유적전시관 옥외 CCTV 배관·배선 공사

· 전시관리관 내부 통합배선·방송설비·케이블티비·CCTV 공사

□ 계약개요

· 계 약 자: ㈜경성네트웤

· 계약금액: *********(2019년 이월예산)

· 공사기간: 2019. 3. 26. ~ 2020. 9. 30.

Ⅱ		설계변경 내용

□ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제19조(설계의 변경) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제12·14조(설계변경 등)

□ 실정보고 내용

(금액단위: 천원)

구 분	내 용	금 액	검토결과
1.옥외시설 통신설비	옥외시설 통신설비(CCTV) 공사내역 누락으로 인한 맨홀 및 폴대 기초 추가	******	적절
	남산 매점소송으로 인한 임시 전시관리실 이전설치를 위한 배관·배선 추가	*****	적절
	임시 가건물에서 전시관리실로 방송장비 및 CCTV장비 철거 및 이전설치	*****	적절
2.옥외 CCTV 관로설비 통신공사	루트 변경을 통해 배관구간 감소 (남산 CCTV 확장을 위한 공배관 루트를 기존공사 루트에 합하여 시공)	********	적절
	소 계	******
	공사계약에 따른 제반경비 및 이윤, 부가세 포함 공사비 변경액	******
3.물가변동 조정비용	공사지연으로 물가상승분 조정 반영 (물가상승률 3%, 공사지연 90일 이상)	*****	적절
합계	총 공사금액 변경	******	적절

□ 계약금액 변경내역

(금액단위: 천원)
구 분	당 초	변 경	비 고
총 공사비	*******	*******	********

□ 감리원 검토의견

- 문화재 수리업자로부터 제출된 설계변경 요청에 대해 설계변경 개요서,시방서, 계산서, 산출조서 및 설계도면 등의 적합성을 검토한 바 설계변경 내역서에 대한 타당성이 인정됨

Ⅲ		처리의견

□ 감리자의 검토의견과 같이 공사금액 변경사항에 대하여 계약금액을 변경(공사비 ***********)하고자 함

□ 변경된 공사금액은 공사 1차분 기성(2020.6.30.예정)시 지급 예정

※ 차후 건축공정에 맞추어 공사기간 추가 연장 필요(2021.2.16.까지)

붙임 1. 설계변경 검토보고(공문) 1부

2. 설계변경 검토보고(기술검토의견서) 1부

3. 설계변경 요청(경성네트웤) 1부

4. 물가조정 용역보고서(한양경제연구원) 1부

5. 설계변경 시방서 및 도면(별도전송).  끝.