실정보고 검토서

공사명

강남순환도시고속도로 4공구 건설공사

공사개요

· 위    치: 금천구 독산동~소하동 JCT

· 규    모: 폭4~8차로, 연장 2.48㎞

· 공사기간: ’01.12.29.~’20.5.31.

· 도 급 비: 202,020백만 원

· 시공사: 롯데건설(주)

· 감리단: ㈜서영엔지니어링

· 설계사: ㈜서영엔지니어링

실정보고 건명

금하마을 앞 보도 신설

실정보고

사유

금천구청 도로과에서 금하마을 앞 보도 신설 등을 요청함에 따라 보도포장 등 시설물 추가 설치 반영

건설사업관리단

검토의견

금하마을 앞 보행자 편의 시설 시공 수량 및 공사비는 적정함.

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
부대공	도로경계석 1,634m 소형고압블록 630m2 - 안전펜스 102m - L형측구 175m	도로경계석 2,274m - 투수블록 포장 1,101m2 안전펜스 325m 버스승강장 이전 1개소 L형측구 790m	증) 640m 감) 630m2 증) 1,101m2 증) 223m 증) 1개소 증) 615m
금액	115,200,000	212,700,000	증) 97,500,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

“해당 없음”

발주처

검토의견

금하마을 앞 보도 신설에 대한 실정보고 내용은 적정함.

비 고

결재

담당

김구

과장

代이상욱A

부장

05/13

代진재섭