문서번호		차량계획처-3859		부장		팀장	처장		본부장
등록일자		2020.05.13.
									05/13
결재일자		2020.05.13.
공개여부		대시민공개
				협조	차량계획팀 팀장
방침번호		본부장-64
					차량정비처 처장
					차량운영처 처장(직무대행)
	- 5호선 하남 연장선 - 개통대비 차량분야 준비계획(안)
2020. 5.
차량계획처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	■	□
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	■	□
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

- 5호선 하남 연장선 -

개통대비 차량분야 준비계획(안)

5호선 하남 연장선 1단계 구간(상일동역~하남풍산역)이 `20.8.8일 개통 예정됨에 따라 차량분야 준비계획을 수립하여 차질없이 개통할 수 있도록 시행에 만전을 기하고자 함.

[관련 근거]

○ 신교통사업처-3213호(`19.10.11.)「하남선 복선전철 관리운영사업 위·수탁 협약 체결 알림」

○ 하남선운영준비단TF-819호(`20.05.04.)「하남선(5호선 연장) 1단계 구간 개통 예정일 지정 알림」

1		경과사항

1. 하남선 복선전철 건설협약 체결: `14.03.18.

○ 협약체결기관: 서울시, 경기도, 하남시, LH공사, 서울교통공사

2. 전동차 제작 및 개량 조달계약 체결(서울시도기본 발주): `15.12.16.

○ 계약금액: 48,275,700,000원(계약자: 현대로템)

3. 초도편성(577편성) 고덕차량사업소 반입: `18.05.08.

○ 잔여 3편성(578~580) 반입 완료: `19.03.22.~`19.04.08.

4. 하남선 복선전철 관리운영사업 위수탁협약 체결: `19.10.04.

○ 협약체결기관: 하남시, 서울교통공사

○ 주요 내용

- 운영기관 업무범위는 차량의 정비 및 열차의 운행관리, 업무에 수반하여 발생하는 제반 업무 등

5. 1단계 구간(미사역, 하남풍산역) 개통예정일 지정 알림: `20.05.04.

○ 영업시운전 기간: `20.5.18~6.18(개통예정일: `20.8.8)

- 연장구간 신규인력(차량22명) 배치 운영: `20.5월 임용 예정

- 개통일은 영업시운전 등 종합시험운행 결과에 따라 변경될 수 있음

2		현 황

구 분	현 재	1단계 개통	2단계 개통
개통 예정일	-	`20. 8. 8.	`20.12월 예정
영업 시운전	-	`20.5.18.~6.18.(32일)	`20.9월 예정
운 행 구 간	방화~ 상일동/마천	상일동~하남풍산 (+3역 , H1역 무정차통과)	하남풍산~하남검단산 (+2역)
전동차 투입계획	65편성	65편성	67편성(+2편성)
운용편성 수	70편성	72편성 (신조차 +2편성)	74편성 (신조차 +2편성)

※ 신조차 운영시기는 철도안전관리체계 변경승인 결과에 따라 변경될 수 있음

3		개통준비 총괄표

연번	구 분	업 무 내 용	완료일	진행율 (%)	계획·추진	비고
			추진기간		시행(협조)
1	시운전 참 여	◦ 본선 시운전팀 구성 및 운영 - 2018.5월~시행중(총 6명) ※ 신조차 연장구간 시운전시험 완료 (기존차 개량 후 연장구간 시운전 시험 진행 중)	‘20.6월	시행중 (70%)	차량계획처
			`18.4월 ~ `20.6월		하남선 전담반
2	기 술 교 육	◦ 신조 및 개량 전동차 기술교육 시행 - 차량, 승무, 관제분야 기술교육 - 차량분야 특별 기술교육 (승무분야 운전 실무수습 교육)	`20.4월	완 료 (100%)	차량계획처
			`18.7월 ~ `20.4월		고덕/방화 차량사업소
3	기 존 전동차 개 량	◦ 기존전동차 개량작업 - 대상: 5호선 76편성(608칸) - 5호선 연장구간 운행을 위한 신호, 방송, 표시기 등 5개장치 개량작업 및 성능검증 완료	`18.12월	완 료 (100%)	차량계획처
			`18.9월 ~ `18.12월		고덕/방화 차량사업소
4	전동차 관 리 시스템 등 재	◦ 전동차관리시스템 등재 내용 - 정비지원, 기초정보 등 추가편성 내용 - BOM체계 작성 및 시스템 반영 - 전동차 배속 변경사항 - 전동차 검사표 제정내역 등	`20.8월	시행중 (30%)	차량운영처
			`18.4월 ~ `20.8월		(차량계획처)
5	신 조 전동차 인 수	◦ 신조전동차 인수 - 대상: 신조전동차 4편성 32칸 - 1단계 개통 대비 전동차 운용 및 유지관리를 위해 (가)인수하고 사업종료 후 정식 인수 시행 (인수검사 시행 후 서울시도시기반 시설본부에서 ㈎인수 요청시)	`20.8월	시행중 (35%)	차량계획처
			`18.4월 ~ `20.8월		고덕/방화 차량사업소
6	전동차 배 속	◦ 전동차 배속 - 신조전동차 4편성 : 고덕차량사업소 - 기존전동차 2편성(537,538) : 고덕 → 방화 배속 변경	`20.8월	준비중 (0%)	차량계획처 차량운영처
			`20.8월		고덕/방화 차량사업소
7	인 력 운 영	◦ 연장구간 인력 운영 - 차량직렬 22명 신규교육 후 인력 배치 - 차량기동반 인력은 운영여건에 따라 탄력 배치	`20.5월	시행중 (50%)	차량계획처
			`20.5월		고덕/방화 차량사업소
8	개통대비 유지보수	◦ 전동차 검사기준 마련 - 검사규정, 검사시행 예규 제·개정 - 표준작업 절차서, 검사표 제·개정 ◦ 검사계획 조정 등 개통 준비 - 검사계획(경정비,중정비,청소) 조정 - 현장 응급조치(SOP) 작성 및 교육	`20.8월	시행중 (40%)	차량운영처 차량정비처
			`20.3월 ~ `20.8월		고덕/방화 차량사업소
		◦ 철도안전관리체계 변경 승인 - 변경승인 요청(국토교통부) - 검사필증, 검사시행 예규 등 제출 - 서류검사 및 현장검사 시행	`20.7월	시행중 (60%)	차량계획처
			`20.3월 ~ `20.7월		고덕/방화 차량사업소
9	연장구간 기동반 운 영	◦ 연장구간 차량기동반 운영 준비 - 1단계 영업시운전시부터 운영 - 기동반 비품 및 전동차 예비품 확보 (공용공구 등 111품목) - 응급조치요령(SOP) 교육 시행	`20.8월	시행중 (60%)	차량운영처
			`20.4월 ~ `20.8월		고덕/방화 차량사업소
10	사 후 관 리	◦ 신규 전동차, 개량 전동차 하자 처리 - 하자보증기간: 3년 (예비품, 시험기 포함) - 하자처리 절차에 의한 관리 - 운용지원을 위한 사후관리직원 (현대로템) 고덕차량사업소 상주	하자 종료시	시행예정 (0%)	차량계획처
			`20.8월 ~ 종료시		고덕/방화 차량사업소

4		결 론

5호선 연장 하남선 1단계 구간(상일동역~하남풍산역) 영업시운전 및 개통대비,    차량분야 각 부서별 기술교육, 전동차 인수 및 유지보수, 기동반 운영 준비    등 본 보고서 계획(안)과 같이 사전에 철저히 준비하여 신설된 연장구간     개통에 만전을 기하고자 합니다.

첨부  1. 개통대비 부서별 세부 추진업무 1부.

2. 지정예비품, 시험기 및 특수공구 목록 1부.

3. 기술자료 목록 1부.

4. 운용지원(OS) 예비품 목록 1부.

5. 차량기동반 비품 목록 1부.  끝.

2020.  5.

차량본부(차량계획처)