코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(한강철교 남단 저이용부지 활용방안 수립 용역)

우리부서 추진중인“한강철교 남단 저이용부지 활용방안 수립 용역”과 관련하여 아래와 같이 변경계약(준공기한 연기)을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 한강철교 남단 저이용부지 활용방안 수립 용역

나. 계약금액 : 금일억팔천구백칠십만원(금189,700,000원정)

다. 계약업체 : 비엠도시건축사사무소

라. 변경사항 : 용역기간 (기타사항 변경 없음)

(당초) 2019. 05.20 ~ 2020.05.19

(변경) 2019. 05.20 ~ 2020.10.19

**************************************************************************

****************************

붙임: 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공공개발기획단장
주무관	박학균		사전협상팀장	김준형		공공개발추진반장	05/08 이상면
협조자
시행	공공개발기획단-5048	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 신청사 9층	/
전화	02-2133-8361	/전송	02-2133-0737	/	chobab73@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)