문서번호	기전과-4811
결재일자	2020.5.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		윤석주	05/11 서수일
협조	주무관		최재호
	주무관		한상원

용역준공 완료보고

「서빙고지하차도 외 11개소 도로조명설비 실시설계 용역」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  5.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

용역준공 완료보고

「서빙고지하차도 외 11개소 도로조명설비 개선사업 실시설계 용역」

지하차도 및 고가차도 노후 조명설비를 LED로 개량하는 사업의 일환으로 관련법령과 기준에 적합한 조도개선, 시민 안전통행 확보 및 쾌적한 환경 조성을 위한 설계품질 확보를 위하여 추진한 실시설계 용역을 완수하였기에 검토 보고드림.

1		추진 경과

용역 추진계획 보고            :「기전과-1054호(’20.1.31.)」

실시설계 용역 계약의뢰        :「기전과-1389호(’20.2.10.)」

□ 계약 기간 : ’20. 2. 21. ~ 4. 30.

좋은빛위원회 심의신청         :「기전과-4070호(’20.4.16.)」

□ 심의일시 : ’20. 5. 7.(화) 13:30 ~

□ 심의대상 : 고가차도 8개소 가로등

실시설계 용역 성과품 납품     : ’20. 4. 29.

좋은빛위원회 심의결과 통보    :「도시빛정책과-5802호(’20.5.11.)」

□ 심의결과 : 조건부동의

실시설계 용역 성과품 검사(수) : ’20. 5. 11.

2		용역 개요

용역 개요

□ 용  역  명 : 서빙고지하차도 외 11개소 도로조명설비 개선사업 실시설계 용역

□ 계약 금액 : ************

□ 계  약  일 : 2020. 02. 21.

□ 착  수  일 : 2020. 02. 24.

□ 준공 기한 : 2020. 04. 30.

□ 성과품 납품일 : 2020. 04. 29.

□ 계약상대자 : **********************

□ 용역 대상

- 지하차도 3개소(차도등) : 서빙고, 성산, 이태원

- 고가차도 8개소(가로등) : 한남1, 모래내, 두무개, 남산관광로(남산소월), 욱천, 성산, 현저, 봉원, 한남2

※ 한남2고가차도 가로등은 당초 용역대상이었으나, 서울시 도시기반시설본부에서「한남2고가 보수공사」시행 시 가로등 교체 및 등주 보강을 시행하기로 함에 따라 제외함.

□ 주요 과업 내용 : 기존 등기구 철거 및 LED 등기구 설치공사 실시설계

- 조명 부하계산 및 적합한 조도설계에 따른 시뮬레이션 검토

- 등기구 교체 및 분기접속 등 공사 내역 산출

- 주요자재 비교검토

- 사전 심의 참석 (좋은빛심의)

3		용역 결과

설계금액

□ 총공사비 : ********* (도급비 : *********, 관급비 : *********)

- 서빙고지하차도 : ********* (도급비 : ********, 관급비 : ********)

- 성산지하차도 : ********* (도급비 : ********, 관급비 : ********)

- 이태원지하차도 : ********* (도급비 : *********, 관급비 : *********)

- 고가차도 8개소 : ********* (도급비 : *********, 관급비 : ********)

개선규모

구 분	시 설 명	개 선 전		개 선 후		비 고
		형식	수량	형식	수량
지하차도 (차도등)	서빙고 지하차도	NA 250W	105	LED 50W	42
				LED 200W	63
	성산 지하차도	NA 150W	26	LED 100W	26
		NA 250W	113	LED 200W	113
	이태원 지하차도	NA 150W	83	LED 50W	68
		NA 250W	223	LED 100W	238
고가차도 (가로등)	한남1고가	CMH 250W	5	LED 100W	5	○ 한남1고가 - LED 75W(2017년 설치) 38등은 존치 ○ 노후 분전반 교체 - 모래내 1대 - 두무개 2대 - 남산관광로 1대 - 성산 1대
	모래내고가	CMH 250W	20	LED 150W	20
	두무개고가	CMH 250W	65	LED 100W	65
	남산관광로고가 (남산소월고가)	CMH 150W	15	LED 100W	15
	욱천고가	MH 350W	25	LED 150W	25
	성산고가	CMH 250W	11	LED 150W	11
		MH 200W	11	LED 100W	11
	현저고가	MH 350W	19	LED 150W	19
	봉원고가	MH 350W	15	LED 150W	15

보고자 의견

□ 과업지시서에 따라 용역수행을 완료하였고, 설계 성과품 제출 및 사전심의 절차이행에 이상이 없으므로 준공 승인 처리하고자 함.

4		향후 일정

□ ’20. 05. : 예산 재배정 요청 (도로시설과)

□ ’20. 05. : 관급자재 구매의뢰

- 조달 제3자단가계약 및 다수공급자계약 2단계경쟁

□ ’20. 05. : 전기공사 발주 (재무과 및 관리단속과)

- 공사기간 : 착공일로부터 약 60일 간

□ ’20. 06. : 관급자재 납품완료

□ ’20. 08. : 공사 준공.  끝.