“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약금액 변경의뢰(수유6배수지 감시제어시스템 제작구매)

1. 기전설비과-4596호(’20.5.11.)와 관련입니다.

2.『수유6배수지 감시제어시스템 제작구매』건의 설계변경(2회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 수유6배수지 감시제어시스템 제작구매설치

나. 사업개요 : 배수지 증설공사(증3,100㎥)에 따른 부대 자동제어설비 제작구매 설치

다. 계 약 자 : 삼성계기공업 대표 김진택

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	계 약 금 액		비 고
	당 초	변 경
감시제어시스템	147,456,000	154,225,000	증)6,769,000
조달수수료	1,430,660	1,482,110	증) 51,450
합 계	148,886,660	155,707,110	증)6,820,450

※ 조달수수료 산출 : 1억까지(1.07%), 1억이상 (0.76%)

- 물량변경 : 설계변경 내역서 참조

- 사    유 : 유지관리 부서 요청사항 반영하여 계약내역 물량 증감 발생

- 관련법규 : 지방자치단체 물품계약 일반조건 제6절의 1항목

라. 예산과목

예산구분	예산과목	금 액	비 고
사고이월 (2019년)	관)자본적지출, 항)비가동설비자산취득, 세항)건설중인자산 사업)수유6배수지 건설공사, 목)시설비및부대비, 세목)시설비	148,886,660 (기 원인행위액)	< 2019년 > · 선금지급 58,285,200원 < 2020년 > · 추산금액 90,601,460원 (추산번호 : 1573)
당해예산 (2020년)	관)자본적지출, 항)유형자산취득, 세항)구축물 사업)수유6배수지 건설공사, 목)시설비및부대비, 세목)시설비	6,820,450 (증액분)	※ 조달수수료 증액포함 당초 : 1,430,660원 변경 : 1,482,110원 증액 : 51,450원

붙임  1. (방침서)설계변경 및 심의 소위원회 개최 계획 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	생산부장
주무관	임은비		기전설비과장	조성태		생산부장	05/12 서대훈
협조자	주무관	박상권		주무관	이효원		예산팀장	홍경숙
시행	기전설비과-4647	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 서울시 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1337	/전송	02)3146-1319	/		/	부분공개(5)