문서번호	한양도성도감-5173
결재일자	2020.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		곽동진	05/13 안중호
협조

「한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

2020. 5.

문 화 본 부

한양도성도감

「한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

「한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계용역」에 대한 준공기한   연기 검토 보고임

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계용역

○ 위    치 : 한양도성 혜화문 반경 40m이내

○ 설 계 자 : ㈜극동문화전기설계********

○ 용역기간 : ‘20. 3. 30. ~ ’20. 5. 18.

○ 용역금액 : **********

□ 추진 현황

○ 2019. 08. 14. : ‘소방시설 미설치 대상’ 재난안전 관리사업 예산 신청 요청(문화재청 안전기준과-4371(2019.8.14.)호)

○ 2019. 08. 21. : 문화재 재난방지시설 구축 예산 신청(중부수도사업소와 상수도 인입공사 소요예산 등 사전 협의 완료)

○ 2019. 12. 24. : 2020년 문화재 재난안전관리 국고보조금 예산 확정 통지(50백만원(국비 35, 시비 15백만원))

○ 2020. 02. 13. :『한양도성 혜화문 소화전 설치계획』 방침수립

(한양도성도감-1649(2020.2.13.)호)

○ 2020. 03. 23. :『한양도성 혜화문 소화전 설치공사 설계용역 시행계획』

방침수립 (한양도성도감-3430(2020.3.23.)호)

□ 설계자 요청내용

○ ㈜극동문화전기설계(극동(서울시)2003-02호, ‘20. 5. 13)

: 설계용역 준공기한 연기 요청 건

※ 붙임 연기 요청서 내용 참조

□ 검토 의견

○ 용역 준공기한 연기

구 분	변경 전	변경 후	비고
용역 기간	‘20. 3. 30. ~ ’20. 5. 18.	************ ************	*****
용역 금액	**********	**********	*****

○ 연기 사유

: 코로나19 위기경보 격상에 따른 절차(설계 승인 및 협의) 이행 지연으로 이에 대한 용역기간 연장 필요*********************

○ 연기사유 귀책 소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

※ 코로나19 확산방지를 위한 지방계약 업무 유의사항 안내(재무과-10649호, ‘20.2.28) 등 관련

□ 처리 의견

○ 상기와 같은 사유로 설계자의 용역 준공기한 연장 요청은 타당하다 사료되며, 준공기한 연기에 따른 계약 변경하여 용역 추진코자 함.

붙임  1. 용역 준공기한 연장 신청서

2. 합의각서.  끝.