투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경(총차2회, 1차정산, 2차1회) 계약 의뢰-중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사

우리부에서 시행중인 「중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사」 에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차2회, 1차정산, 2차1회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사

나. 도 급 액 : 17,313,546천원

다. 공사기간 : 2019. 05. 27. ~ 2022. 08. 09.

라. 계 약 자 : (유)동경건설 외 2개사

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수및하천관리, 하천복원및정비, 중랑천마스터플랜단기사업, 시설비

바. 설계변경사유

- 실정보고 사항 반영

- 예산 관계로 인한 차수별 공사 물량 조정

사. 설계변경 내역 (공사기간 : 변경사항 없음)

구분	계약금액		비고
	당 초	변 경
총차	17,313,546,000원	18,707,997,000원	증) 1,394,451,000원
1차	2,808,600,000원	2,811,000,000원	증) 2,400,000원
2차	3,526,963,000원	3,512,993,000원	감) 13,970,000원

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차, 1차, 2차) 각1부.

3. 합의각서 1부(별도발송).  끝.

	방재시설부장
주무관	이현호		치수시설과장	손창익		방재시설부장	05/13 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-6792	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02 3708 8774	/전송		/	lhh1030@seoul.go.kr	/	부분공개(5)