“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기(2차)에 따른 재계약 의뢰(교통소통)

우리과에서 시행 중인 『천호시장사거리 배급수관 정비공사 교통소통대책』의 준공기한 연기사유가 발생함에 따라 재계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준공기한 연기 현황

1) 용역명: 천호시장사거리 배급수관 정비공사 교통소통대책

2) 계약 업체: 주식회사 동해종합기술공사(대표: 정점래)

3) 계약 금액: ***********

4) 용역 기간

- 당초: 2020. 2. 17. ~ 2020. 5. 18.(1차연기, 당초 4. 16.)

- 변경: 2020. 2. 17. ~ 2020. 5. 29.

5) 연기 사유: 교통처리 심의위원회 통과 시기를 고려하여 준공기한 연기

6) 귀책 사유: 강동수도사업소(지체상금 미부과)

붙임  1. 관련 방침서 1부.
2. 변경 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	정재필		시설운영팀장	송종학		시설관리과장	05/13 한희선
협조자
시행	시설관리과-6993	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/		/	부분공개(5)