코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경 및 물가조정에 따른 계약금액 변경의뢰(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 통신공사)

1. 한양도성도감-5171(‘20.5.13.)호와 관련입니다.

2. 「남산 회현자락 한양도성 유적전시관 통신공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 및 물가조정을 위한 계약금액 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사(통신)

나. 계약기간 : ‘19. 3. 26. ~ ‘20. 9. 30.

다. 변경사유 : 물량추가, 구간변경 및 공사지연으로 인한 물가상승비용 반영

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)
구 분	당 초	변경내역	변 경
총 공사비	***********	******* ************	***********
		******** ***********
		********** ************

마. 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 남산 회현자락 한양도성 보수‧정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

1. 『남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사(통신)』사업과 『남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사(전기)』사업의 낙찰차액을 활용하여 사업추진

- 낙찰차액 : **********************************

- 소 요 액 : *****************************************

2. 설계변경 금액이 10%를 초과하나 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 3장에 우리시 설계변경 계약심사 대상은 20억 이상의 공사에 해당하므로 계약심사 대상아님

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	백영기		도성관리팀장	정일선		한양도성도감과장	05/14 안중호
협조자
시행	한양도성도감-5209	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-764-9656	/전송		/	baekki98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)