코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	노원구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	2019년 『서울 이윤탁 한글영비』 보수정비 설계 변경(1차) 승인 통지

1. 관련문서

가. 노원구 문화체육과-2023(2020.1.22.), -(2020.5.12.)호

나. 서울시 역사문화재과-4967(2020.3.09.)호

2. 위와 관련하여, 노원구에서 2019년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 보물 제1524호 『서울 이윤탁 한글영비』보수정비사업을 위해 작성된 설계도서에 대하여 다음과 같이 설계 변경 승인(지방검토)하오니 사업 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2019년 『서울 이윤탁 한글영비』 보수정비공사

나. 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 8.

다. 사업예산 : 총220,000,000원(국:154,000천원, 시:66,000천원)

- 2019년 : 금120,000,000원(국:84,000천원, 시:36,000천원)

- 2020년 : 금100,000,000원(국:70,000천원, 시:30,000천원)

※ 2019년도 설계결과, 보수정비 물량 대비 교부된 예산 부족하여 2020년도 예산 추가지원

라. 사업비용 : *************************************

- ***********************************************

- **************************************************

- **********************************************

마. 사업내용

- 2019년 : 영비 세척, 비각보수, 진입부 계단정비

- 2020년 : 영비 세척 및 진입로 정비

바. 설계변경내용 : 비각 보수공사 추가 시행

사. 변경사유 : 현장자문회의 결과 반영에 따라 사업내용 추가(비각 보수공사)되어 설계변경

붙  임  1. 설계변경승인서 1부.

2. 2020년도 문화재수리공사 추진 시 준수사항(지방검토사업) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김민석		문화재사업팀장	신혜숙		역사문화재과장	전결 05/15 권순기
협조자
시행	역사문화재과-9447	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층 (서소문동)	/
전화	02-2133-2633	/전송	02-2133-1062	/	no7msk@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)