문서번호	토목부-9528
결재일자	2020.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		장수철	05/15 김용제
협조

교통안전시설물 추가 설치 검토 보고

【강남순환도시고속도로 4공구 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

도시기반시설본부

토 목 부

교통안전시설물 추가 설치 검토 보고

【강남순환도시고속도로 4공구 건설공사】

금하지하차도 주변 교통사고 예방을 위한 광명경찰서의 교통안전시설물 추가 설치 요청 사항을 반영하고자 보고 드림.

1		공사개요

❍ 위    치 : 금천구 독산동~소하JCT

❍ 규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍ 도 급 액 : 202,020백만 원

❍ 사업기간 : ’01. 12. 29. ~ ’20. 5. 31.

❍ 시공사/감리단 : 롯데건설(주) / ㈜서영엔지니어링

2		보고내용

❍ 광명경찰서 관계기관 회의 결과 금하지하차도 주변 도로 교통사고 예방을 위하여 발광형 도로표지, 미끄럼방지 포장, 충격흡수시설 등 교통안전시설물 추가 설치 요청을 반영하고자 함.

❍ 수량 현황

공종	단위	당초	변경	증·감	비고
미끄럼방지 포장	m2	-	5,639	5,639
교통표지판	개소	-	60	60
안내표지판	개소	-	9	9
시선유도봉	개	-	298	298
차선도색	m2	-	4,581	4,581
충격흡수시설	개소	-	4	4
가드레일	m	-	353	353
보도용 난간	m	-	285	285

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	-	643,218	643,218
제경비	-	156,182	156,182
계	-	799,400	799,400

3		조치계획

❍ 광명경찰서의 교통안전시설물 추가 설치에 대한 책임건설사업관리기술인의 실정보고 내용은 적정하므로 승인처리하고 설계변경에 정산 반영하고자 함.

❍ 단가적용

- 신규단가에 대해 계약상대자와 성실히 협의를 하였으나 이견이 있어 강제협의율(낙찰률 69.28%+100%)×1/2) 적용

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.