문서번호	자원순환과-8660
결재일자	2020.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
임태섭		정충구	05/15 김윤수
협조

『양천자원회수시설』

2차 온수 열교환기 교체공사 자체심사 보고

2020. 5.

자원순환과

『양천자원회수시설』

2차 온수 열교환기 교체공사 자체심사 보고

양천자원회수시설 온수 공급설비인 2차 온수 열교환기 노후·부식으로 인해 누수가 발생하여 안정적 운전을 위한 교체공사 계획의 자체심사 결과를 보고드림

□ 관련근거

❍ 「양천자원회수시설 2차 온수 열교환기 교체공사 계획」승인 요청

[양천 제2020-259호(’20.5.12.)]

□ 교체개요

❍ 건    명 : 양천자원회수시설 2차 온수 열교환기 교체공사

- 설비현황

명칭	수량	규격	형식	용량	비고
2차 온수 열교환기	1기	I.D 940×2,642L	수평 U-TUBE형	19,508,300kcal/hr

❍ 공사기간 : 계약일 ~ 2020. 9월

❍ 공사내용

- 온수 열교환기 제작

- 기존 온수 열교환기 철거, 콘크리트 벽 일부 철거 및 복구

- 신규 온수 열교환기 설치

- 증기 공급배관 일부 철거 및 설치

- 열교환기 제작 및 설치검사, 시운전 등

□ 사업비 심사 결과

❍ 요청금액 : *********

❍ 심사결과 : *********

(단위 : 천원)

건 명	심사요청	심사결과	절감액	절감률
******** ***************	*******	*******	******	*****

❍ 주요 심사내용

○ 자재 단가 조정 : 온수 열교환기 제작

- 125,000천원 → 115,000천원

○ 일위대가 조정

- 밸브 철거(재사용을 고려 안할 경우) : 설치품의 50% → 40%

- 밸브 철거(재사용을 고려할 경우) : 설치품의 60% → 50%

- 강관 철거(재사용을 고려할 경우) : 설치품의 40% → 30%

□ 추진계획

❍ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한, 총액, 적격심사)

- 건설산업기본법 제9조에 의한 기계설비공사업 면허 소지자

- 주된 영업소의 소재지가 수도권(서울, 경기, 인천)에 위치한 자

❍ 추진일정

- 2020. 5월 : 교체계획 승인

- 2020. 6월 : 입찰공고 및 계약

- 2020. 9월 : 교체공사 완료(대정비 기간 내)

□ 행정사항

❍ 2차 열교환기 교체 공사계획 승인 통보 : 시설 운영사

붙임 : 1. 자체심사 내역서 1부.

2. 주요 심사내용 1부.

3. 교체 계획서 및 시방서 각 1부.  끝.