문서번호	교통운영과-7927
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★교통전문관		교통개선팀장	교통운영과장
박평근		김상훈	05/18 강진동
협조

「2020년 도로점용공사장」교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제3차)

2020. 5.

교통운영과

「2020년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제3차)

제3차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회(소위원회)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2020.5.14.(목), 14:00~15:50

○ 참석 위원 : 4명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 3명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : **********************

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 5건

- 결  과 : 조건부 시행 5건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 내부순환로 종암~홍지문터널간 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
내부순환로	‘20.6~11 (183일)	야간(23~05시)	1개차로	서울시설공단 도로시설처

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 공사 중 차로 폭 3.0m인 구간에 대해 속도를 하향하기 바람(제한속도 70km/h에서 60km/h로 규정에 맞게 변경 바람)

- 안내표지 추가설치, 단속카메라 70km/h에서 60km/h로 하향 변경

- 1구간 1단계 기존에 있던 대피폭 0.5m에 0.5m를 추가하여 차로 여유폭이 1m가 될 수 있도록 하여 제한속도 70km/h로 유지하도록 검토 바람

- 1구간 4단계 가속차로 길이가 직접식으로 되어있으므로 완화구간을 길게 조정 바람

- VMS 운영계획을 하월곡 전에 공사정보와 우회 정보를 제공하여 차량을 우회시키길 바라며, 공사 차로를 세부적으로 안내하길 바람

2) 홍익병원~신목중학교 앞 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
목동중앙로, 국회대로	’20.5~11.30(200일)	야간(22~06시)	3.5~5m	강서수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 교통량이 적고 주변이 주거지이므로 공사를 주간에 시행하는 방안을 검토하기 바람(교차로 구간 및 국회대로 제외)

- 공사시 주변에 어린이 보호구역이 있으므로 보행도우미 및 안전시설을 강화하여 공사를 시행하기 바람

- 2-1단계 북측 접근로 통제수를 배치하기 바라며 정지선을 조정하기 바람

3) 서부간선지하도로 민간투자사업 2공구(변경)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로 (점용폭)	사업 시행자
서부간선도로	‘20.6 ~’21.3	24시간	14.9 ~28.9m	도시기반시설본부 토목부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 램프 폐쇄시 사전 및 사후에 대한 우회도로 안내를 강화하기 바람

- 안내시 이용가능 램프와 폐쇄 램프를 색깔로 구분하여 홍보하기 바람

- 폐쇄 램프는 사전에 현수막 등을 이용하여 사전에 홍보를 강화하기 바람

4) 천호시장사거리 배급수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
구천면로	‘20.6 ~7 (58일)	야간(22~06시)	1~2개차로	강동수도사업소 시설관리과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 테이퍼의 변곡점은 직선이 아닌 곡선으로 수정하기 바람

- 교대통행시 통제수는 모범운전수를 배치하기 바라며, 교차로 공사시 방향별로 통제수를 배치하여 공사를 시행하기 바람

- 5-5단계 정지선을 사전에 설치하기 바람

- 분석을 재검토하기 바람

- 보도 공사시 보행도우미를 배치하고 보행안내 입간판을 설치하기 바람

5) 목동 배수지~양천도서관간 장기사용 송배수관 정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
목동중앙로, 목동서로, 목동서로6길	‘20.6 ~12	야간(22~06시)	1~2개차로	강서수도사업소 급수운영과

○ 자문결과 : 백제고분로만 조건부 시행

- 공사 시 공사시간을 아파트단지는 주간에 공사하고, 학교 주변은 야간에 공사하는 등 주·야간공사를 탄력적으로 운영하기 바람(교차로 구간 제외)

- 4단계 차로 테이퍼 길이를 길게 조정하여 차선감소가 원활하게 차선변경이 가능하도록 검토하기 바람

- 6단계 버스정류장 임시 이전 설치구간의 위치를 조정하기 바람

- 12-3단계 한 차로를 모두 점용하지 않고 점용면적을 작게 하여 비보호 좌회전을 할 수 있는 공간을 만들어주는 것을 검토하기 바람

붙임 : 1. 자문위원 참석명단 1부.

2. 공사업체 참석명단 1부.  끝.