문서번호	치수과-2082
결재일자	2020.5.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
방호익	손창열	05/19 전영주

- 한강준설〔저수로〕정비공사 -

현 안 사 항 실 정 보 고

2020. 05.  .

- 한강준설〔저수로〕정비공사 -

현 안 사 항 실 정 보 고

□ 공 사 개 요

○ 공   사   명 : 한강준설(저수로) 정비공사

○ 공  사  규  모 : 저수로 준설 36,240㎥, 사토운반 36,240㎥

○ 공  사  기  간 : 2020.3.23. ~ 2020.11.17.

○ 도   급   액 : 1,534,900천원

○ 시   공   사 : 관악산업(주)

○ 건설사업관리 : ㈜서우티이씨

□ 건설사업관리자 보고내용

○ 관련근거 : 서우-건설관리 2020-029호(2020.05.19.)

○ 보고내용

- 아라뱃길 한강갑문 합류지점 추가물량 발생에 따른 검토보고

․한강갑문에서 한강본류방향 주운수로(L=280m, B=50m) 구간 관공선   (선박)운항 최소수심확보(3.0m)을 위하여 준설작업중에 있으나, 한강갑문   입구 합류지점 퇴적된 모래섬 및 저수로 추가물량이 발생하여 검토 보고임

- 사토 반출 운반 변경(주간⇒야간)에 따른 검토 보고

․치수과-182호(2020.1.16.)호에 의거 준설토를 야간에 반출하는   것으로 설계반영 하였으나, 반출지 사토장이 김포시 농촌마을에     인접하여 민원등을 감안하여 사토반출을 주간 운반으로 변경 보고임

한강갑문 입구	한강갑문 입구 준설구역

□ 준설 수량 증․감 현황

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
준 설	안양천하구	7,500㎥	6,840㎥	ㅿ660 ㎥
	홍제천하구	1,000㎥		ㅿ1,000 ㎥
	만초천하구	4,340㎥	9,860㎥	5,520㎥
	여의하구	14,700㎥	4,250㎥	ㅿ10,450㎥
	당산수상택시	4,000㎥	1,850㎥	ㅿ2,150㎥
	잠실수상택시	4,700㎥	7,900㎥	3,200㎥
	한강갑문주변		19,700㎥	19,700㎥
계		36,240㎥	50,400㎥	14,160㎥
사토 운반	강서야적장	36,240㎥	50,400㎥	14,160㎥

구분	준설계획고(m)	준설량(㎥)		증․감	비 고
		당초	변경
아라뱃길 한강갑분	3.0	0	19,700	증) 19,700	선박안전운항 최소 수심 적용

○ 한강갑문 준설량 및 계획하상고 산정

□ 조치의견(조치계획)

○ 책임 건설사업관리자의 실정보고 내용과 같이 원활하고 신속한 공사 추진을 위해 아라뱃길 한강갑문 합류부 주변 준설작업을 승인하고, 추가 투입되는 공사비는 당초 설계된 준설 수량의 조정, 사토운반 야간할증 미적용(야간 ⇒ 주간) 및 낙찰차액(잔여예산 238,100천원)을 활용하여 설계변경시 반영코자 함.

붙임  1. 낙찰차액(잔여예산) 사용계획 1부.

2. 한강공원내 준설토 운반로 개선 검토 보고 1부.

3. 건설사업관리자 실정보고 서류 1부.  끝.