문서번호	급수운영과-7850
결재일자	2020.5.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조승수	이일로	05/19 이용구
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

착공관련 서류일체 검토 보고

[독산동 범안로 장기사용 송배구관 정비공사]

2020. 05. 19.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

착공관련 서류일체 검토 보고

[독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사]

「독산동 범안로 장기사용 송배급수관 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 착공관련 서류일체가 접수되어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

※관련근거 : 공사감독2처-6536(2019.05.15.) 『착공신고서 검토결과 제출(독산동 송배수관)』

공사감독2처-6537(2019.05.15.) 『시공계획서 검토 제출 및 품질시험계획서 승인요청』

Ⅰ		공사 개요

◯ 공 사 명 : 독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사

◯ 공사위치 : 금천구 독산동1003-9~1007-3

◯ 공사개요 : 송배수관 신설(D=600㎜, L=370m)

◯ 공사위치

******************

◯ 공사기간 : 2020. 4. 17. ~ 2020. 6. 24.

◯ 시공업체 : 승건산업(주)

◯ 건설사업관리단 : 서울시설공단 공사감독2처

◯ 공사개요 : 송배수관 D=600mm, L=370m 변실설치 5개소

◯ 공사금액 : 금308,487,000원

◯ 관련문서

- 공사감독2처-6536(2020.05.15.) : 착공신고서 검토결과 제출(독산동 송배수관)

- 공사감독2처-6537(2020.05.15.) : 시공계획서 검토 제출 및 품질시험계획서 승인요청

Ⅱ		검토 내용

□ 제출사항 검토

◯ 착공신고서, 시공계획서, 품질관리시험계획서 제출사항 검토

- 계약업체 : 승건산업(주) 대표 황상훈

☞ 사업종목: 상하수도설비공사업(*******************)

- 현장대리인 선임계(공사기간: 2020. 4. 24 ~ 2020. 6. 24)

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	********	토목분야 초급기술자	건설기술자 경력증명서 등	감독의견: 가능

- 품질관리자 선임계(공사기간: 2020. 4. 24 ~ 2020. 6. 24)

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	********	토목분야 고급기술자	건설기술자 경력증명서 등	감독의견: 가능

□ 시공배관 상세도

❍ 단수 예상지역 : 없슴

- 단수작업 발생시 단수안내 홍보 실시후 작업계획 예정

□ 예정공정표

□ 공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	***	*************
현장 대리인	***	*************
현 장 담 당	***	*************
감 리 회 사	***	*************
수도 사업소	조승수(담당)	*************
수도 사업소	김홍일(직반장)	*************
수도 사업소	김기태(직반장)	*************

□ 시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
1	현장대리인	***	**************	*****************	토목 초급
2	배관공 (팀장)	***	**************	******************
3	배관공	***	**************	*****************
4	배관공	***	**************	*****************
5	배관공	***	**************	******************
6	배관공	***	**************	***************
7	교통정리원	***	**************	******************

□ 인력투입계획 (1일 투입기준)

직종 공정	토공	부설공	부대공	교통정리	소계
배관공	1인	2인			3인
특별인부	1인	1인			2인
보통인부	1인		1인	2인	4인
계	3인	3인	1인	2인	9인

□ 장비투입계획 (1일 투입기준)

장비명	규격	단위	수량	비고
백호	0.18,06m3	대	2
덤프트럭	15T	대	3
램머	80kg	대	2
콤팩트		대	1
포장절단기		대	1
관전달기	주철관, 급수관	대	2
양수기	5HP	대	2
배관탐지기		대	1
청소장비		조	1	고압세척기등

□ 품질시험계획 검토

◯ 수도용 자재(관급/사급)

구분	공 종	시험종목	시공 계획 물량	시험빈도	계획 시험 횟수	비 고
관급 자재	수도용덕타일주철 직관, 이형관 (KS D 4302)	KSD 4302, KSB 0802 등에 규정된 시험종목	396m	·제조회사별 ·제품규격별	수도자재사업소에서 자재검수를 완료한 자재에 대하여 자재 출급하여 외관검사후 사용 (감독관이 사인)	.
	수도용 고무 (KS M 6613)	KSM 6613, KSM 6784 등에 규정된 시험종목	57개	·제조회사별 ·제품규격별
	상수도 맨홀뚜껑 및 틀 (KS D 6021)	KSD 6021, KSD 4104 등에 규정된 시험종목	5개	·제조회사별 ·제품규격별
사급 자재	환 토 재	KSF 2502, KSF 2504에 규정된 시험함목	490㎥	·골재원마다 ·1,000㎥마다	사급자재공급원 제출시 국립ㆍ공립시험기관의 시험성적서 제출(KS, KC 인증여부 확인)

◯ 토공 및 부설공

공 종	관리대상	검사항목	물량	검사방법	시험빈도
토 공	터 파 기	심도, 폭	1,005㎥	치수 측정	1회/일
토 공	다 짐	층 다 짐	571㎥	두께 측정	1회/일
토 공	되메우기	환토시행	573㎥	환토 상단고 측정 양질토 육안검사	1회/일
토 공	환 토 재	최대입경, 조립률	490㎥	체가름시험	1회/골재원마다 1회/1,000㎥
부설공	플랜지 접합	볼트조임	3개소	조임토크 측정	1회/일
부설공	KP 접합	볼트조임	115개소	조임토크 측정	1회/일

□ 안전관리비 집행계획

건설업체명	승건산업(주)	공 사 명	독산동 범안로 장기사용 송배수관정비공사
공 사 금 액	308,487,000원	공사기간	2020. 04. 24. ∼ 2020. 06. 24
계 상 된 안전관리비	4,247,676원	발 주 처	남부수도사업소

항 목	사용내역	금 액(원)	사용비율 (%)
1. 안전관리자등 인건비 및 각종업무수당	-안전담당자 업무수당 -건설장비 유도원 노임 등	2,400,000	56%
2. 안전시설비등	-별도계상되지 않는 주요 안전시설일체	207,676	5%
3. 개인보호구 및 안전 장구 구입비 등	-각종 개인보호구의 구입,수리,관리비등	1,000,000	23%
4. 안전진단비등	-안전,보건 진단 -유해작업장 환경측정	-	-
5. 안전보건 교육비 및 행사비	-자체 안전교육 -기자재 비용	100,000	3%
6. 근로자 건강진단비 등	-건강 진단비 -구급 의약품	100,000	3%
7. 건설재해 예방 기술 지도비	-건설재해예방 위탁 수수료	440,000	10%
계		4,247,676	100%

구분	안전화	안전모	각반	안전조끼	장화	우의	비고
지급수량 (인당)	3	3	3	3	3	3

Ⅲ		검토 의견

NO	검토항목		검토내용	검토결과
1	현장기술자 지정	현장대리인	○건설산업기본법 시행령 별표5 『공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준』의 공사예정금액30억미만에 해당됨	적정
		품질관리자	○건설기술진흥법 시행규칙 별표5 『건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준』의 초급 품질관리 대상공사에 해당됨	적정
		안전관리자	○의무사항은 아니나, 현장대리인을 안전담당자로 지정함	적정
2	건설예정공정표		○작업간 선행,동시 및 완료 등 공사전,후간의 연간성이 명시되고, 예정공정율이 적정하게 작성됨	적정
3	품질시험계획서		○품질시험계획 수립됨	적정
4	공사도급 계약서사본 및 산출내역서		○공사입찰공고서의 국민건강보험료, 국민연금보험료 등 산출내역서에 조정 없이 반영됨	적정
5	착공 전 사진		○공사예정현황 도로 및 주변 건물 등의 전경이 잘 나타나도록 촬영됨	적정
6	현장기술자 경력확인서		○현장기술자 경력증명서 및 건설기술경력증 제출됨	적정
7	안전관리대책		○안전관리계획 수립 대상건설공사가 아니나, 현장의 안전관리를 위하여 안전관리 대책 수립됨 ○시공계획서 제출시 공단에서 안전관리 대책 세부수립 여부 확인 사항임	적정
8	유해․위험방지 계획서		○해당사항 없음	-
9	노무동원 및 장비투입계획서		○공사의 규모 및 성격, 특성에 맞게 장비 및 수량이 계획됨	적정
10	관급자재 수급계획서		○예정공정에 따른 관급자재 수급계획 수립됨	적정

붙임  1. 공단발송공문(착공신고서 외) 각 1부.

붙임  2. 착공신고서 1부.

붙임  3. 시공계획서 및 품질시험계획서 1부.

4. 안전관리 대책 1부.  끝.