투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	업무지시전(계획공기 내 준공을 위한 공기 만회대책 수립 요청)

1. 업무지시현장 : 신상도 지하차도 확장공사 극동엔지니어링 주식회사, 신상도 지하차도 확장공사 유한회사 한백종합건설

2. 작 성 일 자 : 2020-05-19 15:05:36

3. 지 시 내 용

가. 신상도감 2020-89호(2020.5.12.)와 관련입니다.

나. 기존 지하차도 박스구간 하부에 대한 추가 지질조사 결과 암 굴착으로 인해 전체 공정이 약 4개월 지연될 것으로 예상되어 공사 장기화에 따른 주민 교통불편 등이 우려되는 바, 당초 계획공기(2021.6.30.) 내 공사를 완료할 수 있도록 공기 만회대책을 강구하여 주시기 바랍니다.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					신상도 지하차도 확장공사 책임건설사업관리기술자,신상도 지하차도 확장공사 현장대리인
주무관							이시연			방재시설과장					김태중					방재시설부장					05/19 박홍봉
협조자				주무관						김상용
시행			방재시설부-7099									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8764						/전송			02-3708-8756					/	siyeon0907@seoul.go.kr												/	대시민공개